문서번호	시설보수과-3171
결재일자	2019.11.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
장보규	이호복	조선행		11/26 이철범
협 조

-2019년 최초침전지 유지보수공사- 실정보고(2차)에 따른 조치계획

2019. 11.

- 2019년 최초침전지 유지보수공사-

실정보고(2차)에 따른 조치계획

□ 우리 센터에서 시행중인 최초침전지 유지보수공사의 시행중 공사 감독대행자의 현장 실정 검토 보고(2차)에 대한  조치계획 보고임.

□ 관련문서

○ 난지물재생센터 시설보수과-2349(2019.08.27.)호(2019년 공통분야 유지보수비 잔액 활용 계획)

○ 서울시설공단 공사감독2처-18908(2019.11.25.)호(제2차 현장 실정 검토보고서 제출)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 최초침전지 유지보수공사

○ 공사기간 : 2019.07.10 ~ 2019.12.23

○ 도 급 비 : 1,009,214,650원

○ 시 공 사 : 남강개발(주) 대표 박교경

○ 공사내용

- 단면복구보수(HWP) A=4,382㎡   - 웨어설치 L=371m

- STS 보강 : 73m

□ 실정보고 내용

○ STS 보강 작업을 위한 천막 철거 후 재설치

- 사유 : STS 보강 작업을 위해 침전지의 천막 해체는 불가피하므로 STS 보강 완료 후 침전지 천막 재설치 필요

- 단가 적용 : 5백만원(부가세 별도, 견적 비교 적용)

#1 STS 보강 전	#2 STS 보강 작업 후
보강 위치

○ 수량 증·감 현황

상단 : 당초, 하단 : 변경

구 분	규 격	단위	수 량	증·감	비 고
천막설치	3지	식	-	증) 1	제경비 제외 공종
			1

○ 공사비 증·감 현황

구 분	개략 공사비(단위: 천원)			비 고
	당 초	변 경	증·감
공급가액	917,468	922,468	증) 5,000
부가가치세	91,747	92,247	증) 500
도급액	1,009,215	1,047,767	증) 5,500

□ 검토의견

○ 시공사 및 감독기관이 제출한 실정보고 사항을 검토한바 침전지 천막 해체 후 재설치는 타당한바 공사 진행 승인 코자 함

○ 증가되는 공사비는 잔액활용 계획에 의거 준공시 설계변경(정산) 시행코자 함

붙임 : 감독대행기관 실정보고서 각 1부.  끝.