문서번호	설비부-19020
결재일자	2019.11.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
김현욱		여인웅	11/27 임정규
협조

『양재대로 대모지하차도 가로등 이설 전기공사』

설계변경(제1회) 검토 보고

2019. 11.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『양재대로 대모지하차도 가로등 이설 전기공사』

설계변경(제1회) 검토 보고

『양재대로 대모지하차도 가로등 이설 전기공사』설계변경(제1회) 도서가 제출되어 아래와 같이 검토 보고합니다.

Ⅰ		관 련 근 거

동기공 2019-6494(2019.11.27.)호, 설계변경(1회) 검토 보고

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 :『양재대로 대모지하차도 가로등 이설 전기공사』

공사위치 : 강남구 개포동 일대

*******************************

공사규모 : 폭 4차로, 연장(L=1.174m), 폭(B=20.0~27.5m)

공사내용 : 가로등 이설 공사 1식

************

******************

시 공 사 : ㈜다원종합전설

감 리 사 : ㈜동명기술공단

[위 치 도]	[공사현장 전경]

Ⅲ		검 토 내 용

설계변경 근거

□ 도시기반시설본부-19-13585(2019.11.25.), 실정보고 승인 통보

설계변경 내용
□ 토목공사 현장여건 변경에 따른 가로등 이설 물량 반영

□ 가로등 전원 케이블 고재처리 물량 반영

주요물량 변경 사항

품 목	규 격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증·감
L-가 A PNL	가로등이설	개소	19	21	증)2
L-가 B PNL	가로등이설	개소	21	19	감)2
L-가 C PNL	가로등이설	개소	17	22	증)5
L-가 D PNL	가로등이설	개소	18	23	증)5
L-가 E PNL	가로등이설	개소	15	15	-
L-가 F PNL	가로등이설	개소	15	13	감)2

공사비 변경 사항                                         (단위: 원)

순번	구 분	공사비			비 고
		당초	변경	증. 감
*	***	**********	**********	*********
*	***	*********	*********	*******
*	***	**********	**********	*******
*	*****	*********	*********	*******
*	**	*********	*********	*******
*	*****	**********	**********	*******
*	**	***********	***********	*********

감리단 검토의견
❍ 금회 설계변경(제1회)은 양재대로 대모지하차도 가로등이설 전기공사         현장여건 변경에 따른 현 공정 계약물량에 대한 적정성 검토 반영 사항에          대한 실정보고 승인사항을 설계변경 함으로,
❍ 공사계약일반조건 제19조 및 제20조에 의거 설계 변경함은 타당하다고         판단 됨.

Ⅳ		검 토 결 과

㈜동명기술공단에서 제출한 설계변경(제1회) 도서가 적합한 것으로 판단되어 총무부에 변경계약을 의뢰하고자 함.

붙임  설계변경 검토 보고(감리단 공문) 1부.  끝.