2019년도 제30차 교통영향평가 심의위원회 심의안건

□ 일  시 :  2019. 11. 25.(월) 14:00

□ 장  소 :  서울시청 서소문별관 1동 7층 회의실

□ 안  건 :  신설 지구단위계획 재정비 외 5건

접 수 번 호	사 업 명	사업시행자	평가기관	심의 종류	심의 결과	비 고
2019-63	신설 지구단위계획 재정비 (동대문구 신설동 117-23번지 일대)	동대문구청장	동해엔지니어링㈜	신규	보완	동대문구 (도시계획과)
2019-88	용산 지구단위계획 및 아세아파트 특별계획구역 세부개발계획 (용산구 한강로3가 65-584번지 일대)	㈜부영주택	동해엔지니어링㈜	신규	보완	용산구 (도시계획과)
2019-78	무지개아파트 일대 재건축정비사업(약식) (금천구 시흥동 109-1번지 일대)	무지개아파트 일대 재건축정비사업조합	㈜동해종합기술공사	신규	보완	금천구 (주택과)
2019-84	동작구 상도동 산65-74 일대 공동주택 신축 (동작구 상도동 산65-74번지 일대)	국제자산신탁주식회사	㈜도시발전연구원	변경	수정의결	동작구 (주택과)
2019-81	옛 제일은행 본점 용도변경 (중구 충무로1가 53-1번지)	㈜신세계	㈜동림피엔디	변경	원안의결	중구 (도심재생과)
2019-58	서울특별시교육청 신청사 건립 사업 (용산구 두텁바위로 27)	서울특별시교육청	㈜상상이앤씨	보완	보완	용산구 (도시계획과)

2019년도  제30차 서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 신설 지구단위계획 재정비

(동대문구 신설동 117-23번지 일대)

□ 심의일시 : 2019. 11. 25.(월) 14:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 구역면적 145,615.00㎡

○ 사업기간 : ~2027년

○ 사  업  자 : 동대문구청장

○ 수립대행자 : 동해엔지니어링㈜

□ 심의내용 : 보완

구 분	심 의 내 용	비 고
	○사업지 내 이면도로 확폭은 원칙을 설정하여, 적정 폭원 이상 확보할 것 - 노상주차면 삭제 검토 - 보도 폭원 확보 연계 - 교차로 가각부 정리 등 ○사업지 내･외부 교차로의 기하구조 및 신호현시체계 재설계할 것 - ⑦청계7가사거리 적정 신호현시체계 재검토 - ⑤대상빌딩앞교차로 회전차로 확보 - ③신설동역오거리 운영방안 재검토 및 용두역방면 우회전 차로 적정성 재검토 ○차도 및 보도 폭원을 조정하여 자전거전용도로 설치 계획을 제시할 것 ○제시한 일방통행계획의 적정성을 재검토할 것 ○장래 주차수요를 감안한 적정한 주차 계획을 제시할 것 ○공동개발 계획을 재검토하여 개별필지의 진출입구를 최소화할 것 ○전면공지는 기능에 맞게 재설계할 것

○ 의결내용 세부명세

서울특별시 교통영향평가심의위원회 위원장 (서 명)

2019년도  제30차 서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 용산 지구단위계획 및 아세아아파트 특별계획구역 세부개발계획

(용산구 한강로3가 65-584번지 일대)

□ 심의일시 : 2019. 11. 25.(월) 14:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 구역면적 51,915.00㎡

○ 사업기간 : ~2023년

○ 사  업  자 : ㈜부영주택

○ 수립대행자 : 동해엔지니어링㈜

□ 심의내용 : 보완

구 분	심 의 내 용	비 고
	○사업지와 사업지 남측도로를 연결하는 철길 입체화사업을 추진할 것 ○서빙고로는 차로운영계획을 재수립할 것

○ 의결내용 세부명세

서울특별시 교통영향평가심의위원회 위원장 (서 명)

2019년도  제30차 서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 무지개아파트 일대 재건축정비사업(약식)

(금천구 시흥동 109-1번지 일대)

□ 심의일시 : 2019. 11. 25.(월) 14:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 28,336.00㎡, 건축연면적 144,002.08㎡

○ 사업기간 : ~2023년

○ 사  업  자 : 무지개아파트 일대 재건축정비사업조합

○ 수립대행자 : ㈜동해종합기술공사

□ 심의내용 : 보완

구 분	심 의 내 용	비 고
	○사업지 출입구는 주거시설과 비주거(문화시설, 근생)시설을 분리하여 계획할 것 - 주출입구는 주거시설 전용으로 계획할 것 ○이와 연계하여, 지하주차장 동선체계를 전면 개선할 것 - 막다른 구간 최소화 - 지하주차장 램프 단부의 통로 폐쇄 등 ○②금천구청입구교차로와 시흥대로71길 접점부는 차량통행에 문제가 없도록 개선할 것(가각 정리 등) ○주출입구의 드롭존은 보행동선을 고려하여 위치를 조정할 것 ○부출입구(지하2층)는 차량통행이 원활하도록 개선할 것(주거시설 진입시 가각 정리 등) ○[단기안]①금천경찰서앞교차로는 직진선형을 개선할 것

○ 의결내용 세부명세

서울특별시 교통영향평가심의위원회 위원장 (서 명)

2019년도  제30차 서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 동작구 상도동 산65-74번지 일대 공동주택 신축

(종로구 인사동 87번지 일원)

□ 심의일시 : 2019. 11. 25.(월) 14:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 33,897.00㎡, 건축연면적 121,649.69㎡

○ 사업기간 : ~2022년

○ 사  업  자 : 국제자산신탁주식회사

○ 수립대행자 : ㈜도시발전연구원

□ 심의내용 : 수정의결

구 분	심 의 내 용	비 고
	○사업지 동남측 코너부는 운전자 시거확보를 위해 개선할 것 ○사업지 외부에 위치한 드롭존은 사업지 내부로 이전 설치할 것 ○④신상도초교 앞 삼거리는 교통섬을 삭제하여 기하구조를 개선할 것 ○⑤영동교회 앞 사거리는 신호현시체계를 재설계할 것 - 비보호좌회전 등

○ 의결내용 세부명세

서울특별시 교통영향평가심의위원회 위원장 (서 명)

2019년도  제30차 서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 옛 제일은행 본점 용도변경

(중구 충무로1가 53-1번지)

□ 심의일시 : 2019. 11. 25.(월) 14:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 2,157.40㎡, 건축연면적 8,252.69㎡

○ 사업기간 : ~2021년

○ 사  업  자 : ㈜신세계

○ 수립대행자 : ㈜동림피엔디

□ 심의내용 : 원안의결

구 분	심 의 내 용	비 고
	○별도의견없음

○ 의결내용 세부명세

서울특별시 교통영향평가심의위원회 위원장 (서 명)

2019년도  제30차 서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 서울특별시교육청 신청사 건립 사업

(용산구 두텁바위로 27)

□ 심의일시 : 2019. 11. 25.(월) 14:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 13,214.20㎡, 건축연면적 40,555.43㎡

○ 사업기간 : ~2020년

○ 사  업  자 : 서울특별시교육청

○ 수립대행자 : ㈜상상이엔씨

□ 심의내용 : 보완(2차)

구 분	심 의 내 용	비 고
	○사업지 북측은 차량 교행이 가능하고 보행자 안전을 고려하여 충분한 공간을 확보할 것 ○⑧용산고교 앞 교차로는 신호현시를 재설계할 것 - 직･좌 분리신호 또는 비보호좌회전 검토 - 대각선횡단보도 적정성 검토 등 ○두텁바위로의 차로운영계획은 재설계할 것 ○지하1층의 통로상에 위치한 기둥은 위치를 조정(동측으로 1.0m 이상)하여 차량 회전이 원활하도록 할 것

○ 의결내용 세부명세

서울특별시 교통영향평가심의위원회 위원장 (서 명)