투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시 동부도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	교통안전시설물(교통신호기) 원인자 부담공사 변경승인 요청(밤고개로)

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 본부에서 추진하고 있는『밤고개로 확장 전기공사』 관련 공사기간이 연장됨에 따라  아래와 같이 원인자 부담 공사기간 연장을 승인 요청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 밤고개로 확장 전기공사

나. 공사구간 : 밤고개로(세곡동사거리 ~ 수서IC)

다. 공사기간 : 2017. 6. 5. ~ 2019. 12. 31.

라. 원인자 및 업체현황

원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
도시기반시설본부 (설비부)	㈜제일엔지니어링	㈜제일엔지니어링	㈜신화티앤에스

마. 변경 승인 요청사항

구 분	변경 전	변경 후	비고
공사기간	2017. 6. 5. ~ 2019. 12. 31.	2017. 6. 5. ~ 2020. 04. 30.

※ 공사기간 연장사유 : 선행공정(토목) 지연에 따른 공기연장

붙임 공사변경계약서 1부.      끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이창근		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	12/11 임정규
협조자
시행	설비부-20386	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-2660	/	zoom4799@seoul.go.kr	/	부분공개(5)