＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	영등포아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(정산) - 2019 조경관리용역

우리센터에서 시행중인『2019년 영등포아리수정수센터 조경관리용역터)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행코자 합니다.

1. 용 역 명 : 2019년 영등포아리수정수센터 조경관리용역

2. 도 급 자 : 서진조경㈜ 대표 강경호

3. 용역기간 : 2019. 4. 15.~ 12. 20.

4. 예산과목 : 상수도사업비.영업비.정수비.수선유지교체비. 수선유지비

5. 설계변경 사유 : 물량 증․감에 따른 설계변경

6. 설계변경금액 내역                                                       (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감		비고
총공사비	154,153,000	143,460,000	감	10,693,000
도 급 비	147,472,000	139,624,500	감	7,847,500
관 급 비	6,681,000	3,835,500	감	2,845,500

붙임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 심의 결과보고 1부.

3. 심의의견서 1부.

4. 설계변경 내역서(정산) 1부

5. 변경합의서 1부.  끝.

주무관	박성택		정수시설과장	代양묘식		주무관	박소현		영등포아리수정수센터소장	12/13 가길현
협조자
시행	정수시설과-12000	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11	/
전화	02-3146-5678	/전송	02-3146-5697	/	201401235@seoul.go.kr	/	부분공개(5)