“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	광나루수난구조대 신설 전기 공사 금차(1차) 계약 연장 계획 보고

1. 관련문서

가. YJ제2019-1201호(2019.12.10.)호“광나루수난구조대금차전기공사 준공일자 변경 용청 건”

나. 재무과-44413(2019.8.27.)호“계약체결통보(광나루수난구조대 전기공사)

다. 소방행정과-15513(2019.6.14.)호“『광나루수난구조대 신설』공사 추진계획”

2. 위와 관련하여 광나루수난구조대 신설 공사 전기 공사 계약 건에 대하여 건축공사의 진행이 원할치 않아 전기공사를 진행하지 못하여 공사의 원할한 추진을 위하여 금차(1차년도) 계약 준공일을 다음과 같이 계약 연장 코자 보고 합니다

가 전기 공사개요

○ 공 사 명 : 광나루수난구조대 신설 전기 공사

○ 공사업체 : ****************

○ 계약기간

********************************

-********************************

○ 계약금액 : *******************************

나. 계약연장 사유

○ 현재 건축공사가 하부부력체 및 건축 구조체 철골 공사로 전기 공사를 진행할 수 있는 건축 공정이 진행이 안되어 외부 인입 공사외 진행할 수가 없어 불가피하게 전기공사 금차 계약기간에 대한여 연장 필요 및 수용

다. 연장 기간(금차)

********************************

********************************************

라. 건축공사 공정률 : 현 55%(하부부력체 및 철골공사 공사중)

마. 공사 진행 현황

붙임  1. 변경요청 공문 1부(유정전설).

2. 계약연장 합의각서 1부.    끝.

담당자							김영민			자산관리팀장					박정경					소방행정과장					12/13 이홍섭
협조자				담당자						김현석
시행			소방행정과-33326									(						)		접수											(						)
우	08833					서울특별시 중구 퇴계로 2가 52 소방행정과 소방행정타운 추진단															/			www.fire.seoul.go.kr
전화		3706-1394						/전송			3706-1329					/													/	부분공개(6)