문서번호	물재생계획과-16787
결재일자	2019.12.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하수정비팀장	물재생계획과장
이승주		이두환	12/18 代김준형
협조	재무회계팀장		김호남
	하수계획팀장		김준형

신월1배수분구 하수관로 종합정비사업 예산조정(시설비↔감리비) 검토 보고

2019. 12.

물순환안전국

(물재생계획과)

신월1배수분구 하수관로 종합정비사업

예산조정(시설비↔감리비) 검토 보고

신월1배수분구 하수관로 종합정비사업 시행중 지장물(상수도관) 이설공사로 인한 시설비 확보를 위한 예산 변경(조정) 사항을 검토하여 보고 드림

1		사 업 개 요

○ 위    치 : 강서구 화곡1동, 화곡3동, 우장산동 일대

○ 공사규모 : D300㎜~D1,350㎜, L=16.6㎞(’19년 L=2.3㎞)

○ 사업기간 : 2011. 3. ~ 2019. 12.

○ 총사업비 : 24,143백만원(시설비 22,190, 감리비 1,953)

- ’19년 3,900백만원(시설비 3,420, 감리비 480)

2		추 진 현 황

○ ’12. 3. ~ ’13. 11. : 실시설계 용역 시행

○ ’14. 3. ~ ’18. 12. : 1,2,3,6구역 공사 완료

○  ‘18. 3. ~ ’18. 08. : 사업량 조정 재설계

○ ’19. 2. ~ ’19. 12. : 4,5구역 공사 완료

○  ’19.12.현재        : 전체 16.6㎞ 정비 완료(100%)

□ 공사 추진현황

사 업 명	규 모(m)	사업비(도급비)	사업기간	비 고
신월1배수분구 (1공구)	하수관정비 D300㎜~1,350㎜, L=9.5㎞	10,949백만원 (8,106백만원)	‘15.6.8.~ ’19.12.15	장기계속
신월1배수분구 (2공구)	하수관정비 D300㎜~1,000㎜, L=4.8㎞	6,257백만원 (4,598백만원)	‘15.6.8.~ ’19.12.15	장기계속

3		연차별 투자현황

(단위:백만원)

구 분	총사업비	기 투 자(~2018년)	2019년	2020년
계	24,143	20,243	3,900	0
설계비	905	905	-	-
공사비	21,285	17,865	3,420	-
감리비	1,953	1,473	480	-

4		예산 조정 사유

*********************************

**********************************************************************************************************

*************************************************************************

5		조 치 계 획

□ 예산 조정 및 재배정

*********************************************************

- 예산 변경내역                                              (단위 : 천원)

예 산 과 목						예산현액	사업비변경		변경후 예산액
사업명	관	항	세항	목	세목		증	감
신월1 배수분구 하수관로 종합정비	자본적지출 (200)	유형자산취득 (230)	구축물 (234)	시설비 및 부대비	*	*********	******	******	*********
					*** ********	*********	******	*	*********
					*** ********	*******	*	******	*******

붙임   1. 자치구 요청 공문 1부.

2. 관련 보고서 1부.  끝.