문서번호	급수운영과-22585
결재일자	2019.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김승진		김승완	12/19 이병운
협 조

- 2019년 서강동외 7개동 상수도공사 -

설계변경(2회) 심의 소위원회 개최결과 보고

2019. 12

급수운영과

설계변경(2회) 심의 소위원회 개최결과 보고

우리사업소에서 시행중인 「2019년 서강동외 7개동 상수도공사」에 대한 설계변경(2회) 심의결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 공사현황

□ 공 사 명 : 2019년 서강동외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)

□ 공사개요 : 당초 – D=13~300mm, L=2,160m

변경 – D=13~300mm, L=2,160m

□ 공사기간 : 2019.06.10. ~ 2020.06.30.

□ 계약금액 : ************

□ 계약상대자 : **************

□ 감 리 자 : ㈜대한콘설탄트

□ 설계변경 금액 내역

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
도급비	***********	***********	변동없음

2. 설계변경 사유

□ 신규공종 발생 : 대형 계량기 설치공(80mm)외 10개 공종

□ 시공에 따른 물량증감

- 토  공 : 47개 공종중 아스팔트 포장절단외 26개 물량 증감

- 부설공 : 183개 공종중 스테인레스관 부설공(13mm)외 62개 물량 증감

- 구조물공 : 16개 공종중 원형밸브실 설치공(D80mm)외 5개 물량 증감

- 부대공 : 37개 공종중 하수도복구공(PVC 100)외 4개 물량 증감

- 사급자재 : 153개중 주름마디 스테인레스강관(D=13mm)외 20개 물량 증감

- 포장공 : 6개중 보조기층공외 2개 물량 증가

3. 심의회 개최 결과

□ 일 시 : 2019년 12월 17일(화) 10:00~10:20

□ 장 소 : 급수운영과 사무실

□ 위 원 : ***************************************

□ 심의위원 의견 : *****************

4. 조치 의견

□ 상기와 같이 사업소 자체 심의위원회 심의결과를 반영하여 설계변경을 시행하고,       행정지원과에 계약 의뢰코자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경내역서(2차) 1부

2. 사전심의 의결서 1부

3. 합의서 1부. 끝.