부  의  안

1. 제안부서 : 도시재생본부 도시재생사업처 근린재생사업부

2. 제안근거

￮ 설계변경심사위원회 운영기준(2019.01) 4. 운영절차 / 4-1설계변경심사

위원회 / 가. 심사･의결대상

3. 제안사유

￮ 정릉동 행복주택 건설공사 관련하여 법규 및 지침 적용, 품질향상, 하자

예방 등 설계변경에 대한 적정성 심사

￮ 소요자재의 수급방법 변경

￮ 신규품목에 대한 협의낙찰율 사전심사

4. 심사․의결 요구사항

￮ 설계변경의 적정성 심사

- 법규 및 지침 적용, 품질향상, 하자예방 등 설계변경의 적정성

￮ 소요자재(폴리싱 타일, 콘크리트 블럭)의 수급방법 변경 적정성 심사

￮ 신규품목에 대한 협의낙찰율 사전심사

- 협의된 비목 : 계약낙찰율(81.461%) 적용

- 협의되지 않은 비목 : 설계변경당시를 기준으로 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로(90.7305%) 함

5. 참고사항 : 붙임자료 참고

2019년  12월  20일

제 안 자   건축3급  황 의 택    □

제2019-5회(건축) 설계변경 심사위원회 소집통보

수  신 : 건축기술부 이수원 차장, 견적발주부 박준규 차장, 시설관리부

이은성 차장, 재정관리부 지유택 차장, 예산자금부 김헌태 차장

다음과 같이 위원회 소집을 통보합니다.

1. 일  시 : 서면심사

2. 장  소 : 서면심사

3. 의  안

제 안 번 호	제 안 제 목	제 안 내 용	제 안 부 서
제2019-5호 (건축)	정릉동 행복주택 건설공사 설계변경 심사	- 설계변경의 적정성 - 지급자재(폴리싱타일, 콘크리트블럭) 사급전환 - 협의낙찰율 결정	도시재생본부 도시재생사업처 근린재생사업부

4. 세부내용 : “별첨”

2019년    12월    20일

위원장   도시재생사업처장  안 병 기     □

공종별/시점별 설계변경 이행 준수 관리대장

1. 공 사 명 : 정릉 공공주택지구 조성사업(행복주택건설)

2. 공사기간 : 2017.12.29. ~ 2019.12.30

3. 공 종 명 : 건축

4. 공 정 율 : 계획 99% / 실시 99%

5. 주요공사 내용

￮ 가구 설치, 조경 공사

연번	설계변경 주요내용	대상공종	의무완료제 준수 여부	단계별 완료시점 (공정표완료시점)
1	2단계 설계 조정사항	건축	미 준수	지하구조물완료(1층바닥) 후 30일 이내
2	주요 골조공사에 대한 물량 정산	건축	미 준수	지상구조물 완료시점 후(지붕 및 옥탑층 제외) 30일 이내
3	샘플세대 확정에 따른 주요 마감자재 조정사항	건축	미 준수	세대내 방바닥미장 완료 (최상층 골조) 시점
4	준공정산	건축	시기 미도래	입주대비 1단계 점검 완료 시점
▣ 설계변경 의무 완료제 미 준수 ￮ 사유 : 현장여건 및 공정 진행에 따른 설계변경 사항 추가 발생 등