설계변경 심사위원회 심사자료

관련근거

1. 2019년 하반기 공동주택 건축비 목표원가 관리계획(예산자금부-6727호, 2019.12.18.)

정릉동 행복주택 건설공사 설계변경금액 검토                       (단위 : 백만원)

구 분	목표 공사비 (A)	현재 공사비				비율
		현재 계약금액 (a)	기존 설계변경 금액 (b)	금회 설계변경 금액 (c)	변경 계약금액 (C=a+b+c)	목표공사비 대비 (C/A)
건 축	10,362	7,489	45	379	7,913	76.3%
토 목	223	731	65		771	345.7%
기 계	2,689	2,605			2,624	96.8%
조 경	637	479	43		522	81.9%
전기통신	1,926	2,355	231		2,587	134.3%
합 계	15,837	13,659	384	379	14,417	91.0%

※ 공사비 : 도급비+지급자재비+폐기물처리비(승강기 지급자재비는 기계공종에 포함)

※ 현재 계약금액(a) : 물가변동 금액(207,313천원) 포함

기존 설계변경 금액(b) : 설계변경 승인은 완료되었으나 변경 계약 시 반영되지 않은 금액

금회 설계변경금액(c) : 지급자재 사급전환 금액(9,227천원) 포함

※ 추정건설원가 미 산정

목표원가 초과사유 (목표원가 초과 시)

- 해당 없음

향후 원가관리 계획 (원가절감 방안 등)

- 준공 시 미 집행 보험료 등 감액 정산을 실시하여 공사비가 증가되지 않도록 노력