투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	『2019년 차집관로 준설공사』 설계변경(정산) 시행 및 변경계약 의뢰

1. 시설보수과-7107(2019. 12.20.)호에 따라 우리 센터에서 시행 중인 『2019년 차집관로 준설공사(연간단가)』에 대하여 다음과 같이 최종 설계변경에 따른 변경계약을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2019년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사(연간단가)-중랑

나. 도 급 자 : 금희건설주식회사 대표 최 지 희

다. 공사기간 : 2019 2. 1. ~ 2019. 12. 31.

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당초 계약금액	변경 계약금액	증ㆍ감	비 고
총공사비		***********	*************	***************
도급비	공급가액	***********	*************	***************
	부가가치세	**********	***********	***************
	계	***********	*************	***************

마. 설계변경 사유 : 『청계천 차집관로 성능개선공사(우,좌안)』 구간 준설작업 요청 등에 따른 추가 작업 시행 등으로 시공물량 증·감이 발생하여 이에 따른 최종 물량 정산으로 설계변경.

바. 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임문서   1. 방침서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 합의각서 1부 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김원선		주무관	조연상		시설보수과장	임준빈		중랑물재생센터소장	12/20 이성재
협조자
시행	시설보수과-7111	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 본관 3층 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2211-2574	/전송	02)2211-2579	/	kws325@seoul.go.kr	/	부분공개(7)