문서번호	설비부-21235
결재일자	2019.12.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
이지영	김오열	12/20 임정규

『서울공예박물관 조성 기계공사』

계약심사 조치결과 및 변경계약 시행보고

2019. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『서울공예박물관 조성 기계공사』

계약심사 조치결과 및 변경계약 시행보고

「서울공예박물관 건립 기계공사」진행 중 수요기관(서울공예박물관) 요구사항을 반영하기 위해 의뢰한 설계변경 계약심사 결과에 대한 조치 보고 및 변경계약 요청이 있어 보고 드림

************************************************************

1		공사개요

□  공 사 명 : 서울공예박물관 조성 기계공사

□  위    치 : 서울시 종로구 율곡로3길 4

□  규    모 : 건물 6개동, 연면적 10,590㎡(부지면적 12,829㎡)

□  공사기간 : 총차 2018.6.8.~2020.9.30.

□ 공사금액 : 총차 3,620,177,000원

□  도 급 사 : 주식회사거륜에너텍 외 2개사

□ 감 리 사 : ㈜무영씨엠건축사사무소 외 2개사

2		관련근거

□ 무영공예CM 제2019-478(2019.12.19.)호

□ 설계변경 계약심사 조치결과, 총차 및 2차 변경계약 요청 검토보고

3		계약심사 조치결과

□  주요 심사내용 및 조치결과

구분	심사내용	조치결과
자재단가 조정	○ 시로코팬 등 91종 - 조달청 가격정보 등의 단가로 조정	- 심사내용대로 조정함
일위대가 조정	○ 가스차단기 등 28종 - 공구손료 요율 조정 - 서울형 품셈 적용 등	- 심사내용대로 조정함

□  심사결과 반영금액                                  (단위 : 원)

구분	당초	심사결과 반영금액	증감액	비고
총차	*************	*************	*************

4		변경계약 검토

□  계약금액 조정내용

□ 설계변경 및 물가변동으로 인하여 총 585,408,000원 증가한 금액으로 계약금액을 조정함

① 계약심사 완료한 설계변경 금액 :  502,090,000원

② 기승인한 물가변동(2회) 조정금액 : 83,318,000원

(단위 : 천원)

구분		변경전	변경후	증·감
총차	기계설비공사	*************	*************	***********
	가스설비공사	***********	***********	**********
	소방공사	*************	*************	***********
	물가변동 조정금액(1회)	***********	***********	*
	물가변동 조정금액(2회)	*	**********	**********
	합계	*************	*************	***********
2차	기계설비공사	*************	*************	***********
	가스설비공사	**********	**********	**********
	소방공사	*************	*************	***********
	물가변동 조정금액(1회)	***********	***********	*
	물가변동 조정금액(2회)	*	**********	**********
	합계	*************	*************	***********

□  감리자의견

□ 계약심사 받은 내용을 반영하여 내역서를 조정하였으며, 물가변동(2회) 조정금액은 기실정보고하여 승인을 득하였으므로, 설계변경 및 물가변동으로 인하여 증가한 금액(585,408,000원)만큼 계약금액을 조정하여 변경계약하는 것이 타당하다고 판단됨

5		조치 의견

□ 계약심사 결과에 대해 적절히 조치되었으며, 계약금액 조정 대한 건설사업관리단의 의견이 타당한 것으로 판단되므로, 총무부로 변경계약 의뢰하고자 함

붙임 :  감리단 공문 1부.  끝.