문서번호	교량안전과-21651
결재일자	2019.12.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
신익현		강천수	12/24 김종호
협조

- 한강교량 일상유지보수공사(2공구) -

설계변경 검토보고(총괄2회)

2019. 12.

안 전 총 괄 실

(교량안전과)

- 한강교량 일상유지보수공사(2공구) -

설계변경 검토보고(총괄2회)

한강교량 일상유지보수공사(2공구)에 대한 책임건설사업관리기술자로 부터 제출된 설계변경(제2회) 도서에 대한 검토 보고임.

※ 설계변경(제2회)도서 제출<동성감리 제2019-668호, 2019.09.03>

1		공 사 현 황

<공사 개요>

￭ 공 사 명 : 2019년 한강교량 일상유지 보수공사(2공구) - 연간단가

￭ 공사기간 : 2019. 2. 25 ~ 2019. 12. 31

￭ 총사업비 : 3,195백만원 (도급비 2,895백만원, 관급자재 200백만원, 이전비 100백만원)

￭ 시 공 사 : ㈜재강건설

￭ 건설사업책임감리 : ㈜동성엔지니어링 외 2개사

￭ 사업내용

공 종	수 량	공 종	수 량
아스팔트포장 및 방수	15a	상판보수	137㎡
신축이음보수	175.35m	균열보수	200m
표면보수	1,800㎡	단면보수	280㎡
강재도장	540㎡	차선도색	백색(1,000㎡),황색(120㎡)

2		변경 검토내용

○ 대  상 : 제21차 ~ 제32차 작업지시

○ 변경사유

-「2019년 한강교량 일상유지 보수공사(연간단가)-2공구」계약이후 작업지시에 따른 계약정산 물량조정 및 신규 공종 내역반영

○ 검토할 내용

- 작업지시 완료에 따른 수량 증․감 반영 내역

- 산업안전보건관리비 적용 대상 반영내역

- 신규공종 및 조정수량 반영 내역

※ 주요 작업지시 현황

지시번호	대상시설물	주요 작업내용	비고
21차	행주,양화,서강	차선도색 : 백색 890.71㎡, 황색 779.25㎡	작업완료
22차	가양대교	도로 포장복구 및 방수공 211㎡(소규모)	작업완료
23차	서강대교	아스팔트포장(덧씌우기) 4.56a, 신축이음보수 12.5m	작업완료
24차	한강대교	신축이음장치 보수 41.4m, 소규모포장복구 12㎡	작업완료
25차	마포대교	차선도색 : 백색 318.97㎡, 황색 63.75㎡	작업완료
26차	서강대교	신축이음장치 보수 11m, 계단보도부 보수 105.44㎡	작업완료
27차	한강대교	AL배관설치 259.2㎡	작업완료
28차	동작대교	단면보수 139.5㎡, 조합페인트칠 86.4㎡	작업완료
29차	원효대교	균열보수 28.9㎡, 단면보수 1.49㎡	작업완료
30차	동작~행주대교	구조물(부속시설) 세척 75,606㎡, 교량상부 잡초제거 650.99㎡	작업완료
31차	한강대교	신축이음장치 보수 27.6m	작업완료
32차	마포대교	단면보수 5㎡, 조류배설물제거 27.45㎡ 등	작업완료

3		검 토 결 과

○ 계약 공종별 변경(증감) 내역

공 종	세 부 내 용	단위	당 초	변 경	증 ․ -감	비고
철거공	절단(아스팔트, 콘크리트)	m	470	474.9	4.9
교면보수공	절삭 후 아스팔트 덧씌우기	a	15	4.92	-10.08
방수공	도막식	㎡	1,500	504	-996
신축이음보수공	핑거조인트 등 신축이음장치 보수	m	175.35	232.35	57
상판보수공	상판보수	㎡	137	0	-137
콘크리트보수공	균열보수	m	200	207.1	7.1
강재보수공	강관배관 STS D150	m	170	21.2	-148.8
도장보수공	강재보수도장(내, 외부)	㎡	540	0	-540
난간 및 차량방호책 보수공	난간파이프 교체	m	69	69	0
가시설공	비계발판 설치	㎡	160	90.9	-69.1
교통 및 안전시설	차선도색	㎡	1,470	1,995.08	525.08
청소	구조물세척	㎡	120,000	75,606	-44,394

○ 산업안전보건관리비 적용 대상

- 적    용 : 총공사금액 4천만원 이상인 공사(개별단위 작업지시 금액)

→ 제22차(가양대교), 제23차(서강대교), 제24차 (한강대교),

제26차(서강대교), 제30차(동작대교~행주대교)

- 적용방법 : 관련규정에 따라 내역 반영후 준공시 정산

→ 5억이상 50억미만 일반건설(갑)

구 분	금 액(천원)		증․감(△)	비 고
	당 초	변 경
산업안전보건관리비	******	******	*****

※ 적용기준 : (재료비(관급포함)+직접노무비의 합계액) × 1.86% + 5,349천원 또는

(재료비+직접노무비) × 1.86% × 1.2 중 적은금액

※ 관련규정 : 산업안전보건법 제30조(산업안전보건관리비의 계상), 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준

○ 물량조정 적용

- 반영내용 : 관급자재 수량정산 및 신규 및 계약물량 초과수량

- 적용기준 : 작업지시일 기준 산출단가에 대한 협의 결과 반영(협의율 적용)

적용방법	적용차수	적용률(%)	비고
적용내용	21차~32차	93.373

※ 관련근거 : 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 공사계약 일반조건 제7절 1의 나항

- 관급자재 및 이전비 변경

구 분		규 격	단위	수 량 내 역			비 고
				당 초	변 경	증․감(-)
관급자재	아스팔트콘크리트	WC-6, 13mm	톤	97.0	145.0	48
	신축이음장치	GMT FJ-400 900*950*219mm	m	13.5	13.5	0
	구매유보분		식	1	-	-1
폐기물운반	콘크리트(덩어리)	30km, 24Ton,주간	톤	10	14.02	4.02
	콘크리트(덩어리)	30km, 24Ton,야간	톤	90	69.44	20.56
	아스콘(덩어리)	30km, 24Ton,주간	톤	-	-	-
	아스콘(덩어리)	30km, 24Ton,야간	톤	-	-	-
	아스콘(평삭재)	30km, 24Ton,주간	톤	20	-	-
	아스콘(평삭재)	30km, 24Ton,야간	톤	75	141.5	66.5

○ 제경비 정산결과

- 정산대상 : 고용보험, 산재보험, 퇴직공재부금, 산업안전보건관리비, 건강보험, 국민연금

- 정산결과 : 사업자부담분 적용(50%)

구 분	당초	변경	증감(-)
고용보험료	*********	*********	**********
산재보험료	**********	**********	***********
퇴직공재부금	**********	*********	***********
산업안접보건관리비	**********	**********	**********
건강보험료	**********	*********	***********

○ 조정내역 반영결과 공사비 증감

- 공사금액 (감 1,170,356천원)

구 분	공 사 금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증․감(△)
도급비	*************	*************	**************
관급자재비	***********	**********	**************
이전비	***********	*********	*************
계	*************	*************	****************

- 공사기간(변경없음) : 2019. 02. 26 ~ 2019. 12. 31

4		책임건설사업관리기술자 검토의견

○ ㈜재강건설에서 제출한「2019년 한강교량 일상유지 보수공사(연간단가) -2공구」작업지시에 대한 수량 조정 및 산업안전보건관리비, 단가적용, 신규 공종 반영 사항 등에 대하여 설계변경(2회) 서류를 검토한 결과 적정함

○ 제경비 정산항목(고용보험, 산재보험, 퇴직공재부금, 산업안전보건관리비, 교통신호수)에 대한 정산내역 확인결과 적정함

5		조 치 계 획

○ 상기 검토결과와 같이 건설사업관리리단에서 제출한 검토 의견이 적정한 것으로 판단되므로 변경․시행코자 함

붙임  1. 책임건설사업관리기술자 설계변경 보고서 1부

2. 변경 설계도서 각 1부

3. 주요수량 변경내역 1부

4. 합의각서 1부

5. 설계변경 도면 1부(별첨). 끝.