등록번호

도시재생과-10509

주무관

신촌연희도시재생팀장

도시재생과장

도시재생추진단장

등록일자

2019.12.24.

고진성

김경민

代한경순

12/24

박홍표

결재일자

2019.12.24.

공개구분

부분공개(5)

협  조

예산팀장

代조서은

「대현문화공원 정비공사(조경)」등

설계변경 검토 결과 및 낙찰차액 사용계획

2019. 12.

서 대 문 구

도시재생과

「대현문화공원 정비공사(조경)」

설계변경 검토 결과 및 낙찰차액 사용계획

｢대현문화공원 정비공사(조경)｣와 관련하여 공사감독부서(푸른도시과)에서 제출한 설계변경 요청에 대한 검토결과 및 이에 따른 낙찰차액 사용계획 보고임

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 대현문화공원 정비공사(조경)

○ 위    치 : 서대문구 대현동 146번지 일대(대현문화공원)

○ 공사규모 : 공원재정비 3,063㎡(조경수 및 초화류 식재, 공원바닥 포장 등)

○ 공사기간 : ‘19. 10. 15 ~ 12.  27

○ 공 사 비 : 424,817천원(도급비 346,511천원, 관급비 78,306천원)

<위치도 및 공원조성 계획>

Ⅱ		설계변경 검토결과

□ 설계변경(실정보고) 내용

○ 관련근거 : 푸른도시과-21683(2019.12.23.)

○ 주요 변경사유

- (수목 등 식재공종) 동절기 공사 시행에 따라 수급 및 식재가능 수종으로 변경(교목 8종/관목 20종/초화 78종 품종 및 수량변경)하고 음지 생태식재구간은 생육이 양호한 수종으로 교체 필요

- (시설물 설치공종) 현장여건을 감안한 데크상부 테이블, 의자 등 변경 및 바닥레벨 조정에 따른 스탠드 수량 변경(12단→15단), 노출옹벽 차폐를 위한 목재 가림박 설치 필요

- (기  타) 현장여건 반영에 따른 철거물량 변경(야외무대, 콘크리트 옹벽 등) 및 바닥레벨 조정 등에 따른 포장물량 변경 등

<조경 공사비 증감 예상액>

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감
총 공 사 비		424,817,520	438,429,120	증) 13,611,600
도급비	공급가액	315,010,000	331,930,000	증) 16,920,000
	부가가치세	31,501,000	33,193,000	증) 1,692,000
	소 계	346,511,000	365,123,000	증) 18,612,000
관급자재비		78,306,520	73,306,120	감) 5,000,400

<건설폐기물 처리용역 증감 예상액>

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감
총 공 사 비		29,140,000	41,530,000	증) 12,390,000
도급비	공급가액	26,490,909	37,754,545	증) 11,263,636
	부가가치세	2,649,091	3,775,455	증) 1,126,364
	소 계	29,140,000	41,530,000	증) 12,390,000

□ 검토결과 및 문제점

○ 현장여건 및 민원사항 등을 반영하여 보고 내용과 같이 수목(초화) 식재 수종 및 수량 변경과 옹벽차폐시설 설치 등 변경이 필요한 것으로 판단되나

○ 이에 따라「대현문화공원 정비공사(조경)」및 건설폐기물 처리비의 증액이 불가피한 실정으로 예산 추가 확보 방안에 대한 검토가 필요함

Ⅲ		예산확보(낙찰차액 사용) 계획

□ 낙찰차액 사용계획

○ 관련근거 : 행안부 회계제도과-5938(’19.11.1.), 기획예산과-14573(’19.11.7.)

- 시설비 및 부대비 세출 편성목(401)에 대해 준공 등이 완료되어 발생한 낙찰차액에 대하여 동일 단위사업 내 세부사업 간 동일 편성목으로 예산변경 사용 가능

○ 추가 소요예산

(단위:천원)

구분	ⓛ 발주금액	② 계약금액	③ 추가공사비 (예산 부족액)	합 계 (②+③)
합 계	504,751	453,958	26,002	479,960
조경공사	393,411	346,511	18,612	365,123
관급자재	78,307	78,307	-5,000	73,307
폐기물	33,033	29,140	12,390	41,530

○ 낙찰차액 사용(26,002천원)

- 추가 필요예산(26,002천원)은 동일 단위사업 내 세부사업인 ‘마을공간 개선사업’ 의 시설비 및 부대비 낙찰차액을 활용코자 함

<마을공간 개선사업 낙찰차액 현황>

(단위:천원)

세부사업명	① 예산액	② 품의액	③ 원인행위액	④ 낙찰차액 (활용가능액)
마을공간 개선사업	1,253,000	1,120,978	967,061	153,917

※ 예산과목 : 지역균형발전을 위한 권역별 도시재생(정책사업), 신촌연희 도시재생사업 추진(단위사업), 마을공간개선사업(세부사업), 시설비 및 부대비(편성목), 시설비(통계목)

Ⅳ		조치계획

○ ‘신촌동 도새재생활성화 계획(2016.12월)에 의거 추진중인 당해 사업 예산(시비90%, 구비 10%)의 효율적인 집행 및 도시재생사업의 원활한 추진을 위하여

○ 수목(초화) 식재 수종 및 수량 변경 등에 따라 증액되는 조경공사 및 건설폐기물 처리용역 예산(26,002천원)에 대하여 ‘마을공간 개선사업’ 낙찰차액을 활용하여 공사 시행하고 설계변경시 반영코자 함

붙  임 :  1. 실정보고서 검토결과(푸른도시과) 문서 1부

2. ‘대현문화공원 정비공사(조경) 변경 내역서(안) 1부

3. ‘대현문화공원 정비공사 건설폐기물 처리용역’ 변경 내역서(안) 1부

4. 재정 신속집행 관련 변경사항 안내(기획예산과-14573, 2019.11.7)