문서번호	도시철도토목부-13414
결재일자	2019.12.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
최경호		최진규	12/26 정대현
협 조

『신림선 경전철 민간투자사업 궤도공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역』

발주계획(2차) 검토

2019. 12.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「신림선 경전철 민간투자사업 궤도공사 건설사업관리용역」

발주계획(2차) 검토 보고

장기계속계약으로 시행 중인 『신림선 경전철 민간투자사업 궤도공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역』2차계약 발주계획에 대한 검토 보고임.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 신림선 경전철 민간투자사업 궤도공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 구    간 : 영등포구 여의도동 ~ 관악구 신림동

○ 규    모 : 궤도부설 16.7kn(단선기준), 분기기 부설 18개소

○ 용역기간 : 2019.10.28. ~ 2022.02.27.

○ 계약금액 : 1,013,330천원

○ 계 약 자 : ㈜도화엔지니어링(75%), ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소(25%)

□ 계약현황

구 분	총 차	1차(진행중)	금회발주 (2차)	잔여 차수
용역기간	2019.10.28. ∼2022.02.27.	2019.10.28. ∼2019.12.31.	2020.01.01. ∼2020.12.31.	2021.01.01. ∼2022.02.27.
용역금액 (천원)	1,013,330	78,900	596,400	338,030

□ 발주계획(2차)

○ 건설사업관리기술인 투입(단위 : 인/월 )

- 1차 계약 :  4.45

- 2차 계약 : 40.60(당초 42.00, 감 1.40)

- 잔여차수 : 17.45

○ 공정별 발주금액

구 분	총 차	1차(기준공)	금회발주 (2차)	잔여 차수
1. 건설사업관리	877,225,006	66,955,000	515,791,367	294,478,639
2. 손해배상공재료	6,278,546	681,222	3,767,127	1,830,197
3. 사무실임대	37,705,539	4,091,051	22,623,324	10,991,164
4. 부가가치세	92,120,909	7,172,727	54,218,182	30,730,000
합계	1,013,330,000	78,900,000	596,400,000	338,030,000

□ 검토의견

○ 건설사업관리기술인 궤도공사 공정에 맞게 투입계획 조정

- 당초(2차) : 42.0인/원  ⇒ 변경(2차) : 40.6인/원

□ 조치계획

○ 상기와 같이 “신림선 경전철 민간투자사업 궤도공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역” 2차 계약의뢰 하고자 함.

붙임 : 2차 내역서 1부.  끝.