문서번호	도시철도토목부-13392
결재일자	2019.12.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
김윤수		代김윤수	12/26 정대현
협조

『진접선(4호선연장) 차량기지 2공구(차량기지) 건설공사』

건설사업관리용역(2차) 발주계획 보고

2019.12.

도시철도토목부

『진접선(4호선연장) 차량기지 2공구(차량기지) 건설공사』

건설사업관리용역(2차) 발주계획 보고

『진접선 차량기지 2공구 건설공사』의 원활한 공사관리를 위하여 추진중인

감독권한대행등 건설사업관리용역(2차)에 대한 발주계획 검토 보고임.

Ⅰ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 2공구(차량기지) 건설공사

감독권한대행등 건설사업관리용역

○ 용역기간 : 2018.12.01. ~ 2026.02.28.

○ 용역금액 : 6,308,700천원

○ 계 약 자 : **********외 4개사

○ 계약현황                                                  (단위 : 천원)

구 분	총 괄	1차(준공)	2차(금회)	누 계	장 래
용역기간	`18.12.01.~ `26.02.28.	`18.12.01.~ `19.12.31.	`20.01.01.~ `20.12.31.	`18.12.01.~ `20.12.31.	`21.01.01.~ ‘26.02.28.
용 역 비	*********	*******	*******	*******	*********

Ⅱ		추 진 경 위

❍ ‘18.10.12.: 진접선 차량기지 2공구 건설공사 건설사업관리용역 계약

❍ ‘18.11.29.: 진접선 차량기지 2공구 건설공사 건설사업관리용역 일시 정지

❍ ‘19.01.16.: 진접선 차량기지 2공구 건설공사 건설사업관리용역(1차) 착수

❍ ‘19.12.24.: 진접선 차량기지 2공구 건설공사 건설사업관리용역(2차) 발주 요청

❍ ‘19.12.31.: 진접선 차량기지 2공구 건설공사 건설사업관리용역(1차) 준공

Ⅲ		보 고 내 용

❍ 건설사업관리용역(1차)이 2019.12.31. 준공됨에 따라 차량기지 건설공사의

원활한 추진을 위해 건설사업관리용역(2차) 발주 필요

❍ 건설사업관리용역 2차 발주계획

- 용역기간 : `20.01.01. ~ `20.12.31.

- 용역금액 : *******천원

- 투입인원 : 32.83인․월(상주 26.26인․월, 기술지원 6.57인․월)

구 분		단위	투입인원	투입인·월 (고급환산)	감리투입계획
상주 건설사업 관리기술자 (토목)	**	월	1	14.26	`20.01.01.~`20.12.31.
	**	월	1	12.00	`20.01.01.~`20.12.31.
기술지원 건설사업 관리기술자(5개분야)		월	1	6.57	`20.01.01.~`20.12.31.
계				32.83

Ⅳ		조 치 계 획

❍「진접선(4호선연장) 차량기지 2공구 건설공사」의 원활한 공사추진을 위해

아래와 같이 건설사업관리용역(2차)을 발주코자 함.

- 건설사업관리용역(2차)

․용역기간 : `20.01.01. ~ `20.12.31.

․용역금액 : *******천원

․투입인원 : 32.83인․월(상주 26.26인․월, 기술지원 6.57인․월)

붙임  1. 건설사업관리단 검토의견서 1부.

2. 2차 설계내역서 1부.  끝.