문서번호	정보자원운영과-4321
결재일자	2018.6.26.
공개여부	부분공개(2,5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	정보자원운영과장		데이터센터소장
고동수	송상봉	김기항		06/26 김현규
협 조
	인터넷통신과장		황기원
	주무관		박종순

온라인 백업시스템(소산) 확대 구축계획

2018. 6.

데이터센터

(정보자원운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

온라인 백업시스템(소산) 확대 구축계획

데이터센터(서초)와 클라우드센터(상암)가 운영됨에 따라 온라인 백업

시스템을 구축하여 상호 백업센터로 활용함으로써 정보시스템 자료 관리에

만전을 기하고자 함.

□ 추진경과

❍ 온라인 백업(소산) 시스템 도입(‘15.12)

- 서초 데이터센터에 온라인 백업 장비 구축

❍ 서초→상암 백업 실시(‘16.12)

- ***************************

❍ 서초→상암 백업 대상 확대(‘17.12)

- 서초 자료 백업 대상 확대(***TB → ***TB)

□ 운영현황('******)

백업센터	대 상	주기	용 량	백업(소산) 방식
*****	백오피스	월,분기	*****TB (기록관제외)	온라인 전송(***TB) + 테이프 운송
	프론트	분기	**TB	테이프 운송
*****	백오피스	분기	****TB	테이프 운송
	프론트	분기	***TB	테이프 운송

□ 문제점 및 개선방향

❍ 온라인전송과 테이프운송 이원화로 백업 운영 비효율

⇒ ‘19년 장비 확대로 서초↔상암 온라인 백업으로 일원화(기록관 제외)

❍ 데이터 전송량 증가에 따른 네트워크 회선 과부하

⇒ DWDM 증설로 서초↔상암간 네트워크 회선 대역폭 확대

□ 추진개요

❍ 추진 일정 : ***************

❍ 소요 예산 : *****백만원

- 백업 어플라이언스 장비    *************

백업 어플라이언스 : 백업 서버,스토리지를 하나의 장비에 통합한 일체형 장비로 압축 후 저장

- VTL 백업장비              ********

VTL(Virtual Tape Library) : 디스크를 마치 테이프처럼 인식하여 데이터를 저장하는 기술

- DWDM 전송모듈 증설      ************

DWDM : 하나의 광케이블 상에서 여러개의 빛 파장을 동시에 전송하는 광전송 방식

❍ 추진방법 : ‘19년『데이터센터 정보자원통합인프라』사업에 포함

❍ 추진 내용

- [서초 → 상암] 온라인 백업장비 ** 확대(**)

*****

- [상암 → 서초] 온라인 백업장비 신규 ** 구축(**********)

******

- 백업 대역폭 확대를 위한 DWDM 전송 모듈 *식 증설(**********)

*****

□ 기대효과

❍ 자동화된 온라인 백업으로 업무 효율성 향상

❍ 재난·재해 발생 시 신속한 복구로 정보시스템 서비스 연속성 향상

[붙임] 1. 백업 소산 현황

2. 온라인 백업 장비 현황

3. 소요예산 산출내역