하자제로 품질만족 불신제로 고객감동

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	변경계약 체결[서초 성뒤마을 공공주택지구 토지관리 도급용역]

1. 계약부-12575(2019.07.30.)호와 관련입니다.

2. 2020년 상반기 시중노임단가 적용을 위하여 아래와 같이 변경계약을 추진하고자 합니다.

가. 변경계약 내역

구분	변경 전	변경 후	비고
계약기간	2019.08.01.∼2020.02.29.	2019.08.01.∼2020.02.29.	변경없음
계약금액	164,032,780원	164,951,700원	증 918,920원

나. 시중노임단가 변경

구분	2019년 하반기	2020년 상반기	비고
일급 (시급)	78,023원 (9,753원)	79,552원 (9,944원)	증 1,529원 (증 191원)

※ 근거(별첨 참조) : 공공기관노사관계과-2706(2019.12.11.) 「'20년 상반기 시중

노임단가 안내 및 준수 철저」

다. 변경사유

2019년 하반기 발표 시중노임단가(2020년 상반기 적용) 증액으로 계약금액 변경

[물가변동에 의한 계약금액 조정시 단순노무용역의 경우 노무비에 한정(연동되는

사항 포함)하여 계약금액 조정]

※ 근거 :  국가계약법 시행령 제64조 제8항, 지방계약법 시행령 제73조 제8항

붙임  1. 원가계산서(서초성뒤마을 토지관리 도급용역)-낙찰율 적용 (변경) 1부

2. '20년 상반기 시중노임단가 안내 및 준수 철저 1부.  끝.

부 원						파트장				용지보상부장			보상총괄부장	대결	12/31
		박상현						최석준			김달호			김대규
협조자

시행			용지보상부-3106				(2019.12.31)			접수				()
방침번호
우	06336			서울특별시 강남구 개포로 621								/	www.i-sh.co.kr
전화		02-3410-7875			전송	02-3410-7882		/	shluv611@i-sh.co.kr					/	공개