문서번호	조경과-311
결재일자	2020.1.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	조경시설팀장	조경과장		푸른도시국장
협 조

2020년 옥상녹화 조성사업 추진계획

2020. 1.

푸른도시국

(조 경 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2020년 옥상녹화 조성사업 추진 계획

별도 토지보상 없이 도심 내 공원녹지 확충과 열섬현상 완화, 대기질 개선, 생물서식공간 확보 등에 기여하는 옥상녹화사업을 아래와 같이 추진하고자 보고드림.

▢ 추진방향

○ 건물의 안전성을 유지하는 범위 내에서 다층식재로 생태다양성 확보

※ 삼천만 그루 나무심기 사업 조기 달성을 위한 수목식재 위주 사업추진

○ 녹지율을 80% 이상 확보하여 도심 내 녹지량 확충에 기여

※ 세덤류 식재는 지양하고 다층구조의 불륨감 있는 배식계획 도입

○ 생태적, 경관적 효과뿐만 아니라 이용성 등을 고려하여 조성

○ 건축주 및 건물 관리기관에서 유지관리가 용이토록 조성

▢ 추진실적

○ 조성실적 : 헌법재판소 등 758개소(’19년 서울교통공사 등 15개소)

○ 조성면적 : 315,532㎡(’19년 면적 5,056㎡)

< ‘02~’18년 추진실적 >

구 분	계	2015년 이전	2016년	2017년	2018년	2019년
개 소 수	758	697	20	15	11	15
조성면적(㎡)	315,532	291,919	7,075	6,453	5,029	5,056
사업비(백만원)	71,341	63,656	2,262	2,163	1,498	1,762

○ 조성사진

(성동구) 서울교통공사	(강남구) 강남인터넷방송국	(강동구) 상일동 주민센터	(마포구) 상암중학교

□ 2020년 추진계획

○  대 상 지 : 성동구 제2서울창의예술교육센터 등 7개소(붙임 참조)

○  사업규모 : 3,170㎡

○  사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

○  사업내용 : 휴게 및 녹지공간, 텃밭 조성 등 옥상녹화

○  총사업비 : 1,028백만원(시비 722, 구비 306) ※ 사무관리비 등 제외

- 예산과목 : 푸른도시국 조경과, 생활주변 녹지확충, 시민참여 녹지조성, 옥상녹화, 시설비(401-01)/자치단체자본보조(403-01)

○  세부 추진일정

- 2020. 1.       : 사업계획 수립 및 시달

- 2020. 2. ~ 3. : 구조안전진단 시행

- 2020. 3. ~ 8. : 녹화협약 체결 및 실시설계, 설계심의

- 2020. 5. ~12. : 공사시행 및 준공(정산)

□ 행정사항

○ 설계용역 착수 전 옥상녹화 협약체결 및 협약서 제출

○ 설계심의(조경과) 및 계약(원가)심사 결과에 따라 공사비 재배정

- 설계심의 요구 시, 시의회 소통결과 작성 필수

- 사업규모, 설계난이도 등을 고려 설계자문(자체, 내부, 외부) 실시

○ 착·준공 시 5일 이내 보고 및 관련 서류 일체 제출 철저

붙임 : 1. 2020년 사업대상지 및 현황사진 1부.

2. 2019년 옥상녹화 추진실적 1부.

3. 옥상녹화 협약서(안) 및 사업추진 절차 각 1부.

4. 설계심의요구(서식) 및 착·준공보고(서식) 각 1부.  끝.