문서번호	설비부-1158
결재일자	2020.1.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박성수		代이극희	01/23 임정규
협조
	주무관		이극희

『스페이스 살림 조성 기계공사』외 1개 현장

관급자재 승강기 납품·검수 계획 검토 보고

2020. 1.

『스페이스 살림 조성 기계공사』외 1개 현장

관급자재 승강기 납품·검수 계획 검토 보고

『스페이스 살림 조성 기계공사』외 1개 공사의 관급자재 승강기 MAS계약 종료에 따른 납품·검수 계획을 검토하고 보고 드림.

1		계약현황

❍	계약명	:	스페이스 살림 조성 공사 승객용 엘리베이터 구매
❍	계약상대자	:	그린엘리베이터 주식회사(대표 강환흥)
❍	계약기간	:	2019.4.23.~2020.1.28.
❍	계약금액	:	금384,000,000원
❍	납품위치	:	대방동 340-3외 3필지
❍	계약내용	:	승객용엘리베이터 6대(15인승 5대 등)
❍	감리단	:	희림컨소시엄사업관리단

2		검토근거

❍ 스페이스 살림 조성 기계공사 승객용 엘리베이터 납품기한 변경 불가에 따른 합의각서 제출(HTSC 2001-17호)

❍ 동북권 세대융합형 복합 시설 기계공사 승객용 엘리베이터 납품연장 합의각서 제출(창복CM제2001-15호)

❍ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조 제1항

3		검토내용

❍ 당초 관급자재 승객용 엘리베이터 구매 시. 도급공사 준공기한인2020.6.30.까지 납품 요청하였으나 조달청 MAS계약 만료로 2020.1.28.까지 납품토록 되어있으며 추가 납품기한 연장이 불가함.

❍ 다수공급자 계약은 납품완료 시 나라장터 시스템 상에 지체일수를 입력할 수 있으며, 납품기한 이후 계약상대자의 귀책이 아닌 사유로 지연납품 시 그 기간 동안 지체상금 부과 없이 종결할 수 있음.[(조달청 쇼핑몰구매과-11684(2019.10.2.))

❍ 따라서 해당 계약의 납품기한을 연장하지 않고 지체상금 없이 도급공사 준공일인 2020.6.30.까지 물품 납품토록 하며 이후 계약상대자 귀책으로 지연납품 시 지연기간 동안 지체상금 부과토록 합의(같은 사유로 납품기한 연장 불가한 동북권 세대융합형 복합시설 건립 공사의 경우 도급공사 준공기한인 2020.9.28.까지 납품토록 하고 그외의 사항은 동일)함.

❍ 건설사업관리단 의견 : 계약상대자가 제출한 합의각서 및 성능이행보증증권 등이 검토 결과 적합하다고 판단함.

4		검토의견 및 조치계획

❍ 건설사업관리단 제출서류 및 검토의견이 적합하여 보고한 바와 같이 진행하고 추후 적기납품 및 품질확보에 차질이 없도록 업무에 만전을 기하고자 함.

붙임  건설사업관리기술단 검토의견 각 1부.  끝.