문서번호	시설보수과-223
결재일자	2020.1.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
장보규	우배용	조선행	01/31 한성현
협 조
	운영과장		김학춘

난지물재생센터 최초침전지 보수공사 시행계획

2020. 1

난지물재생센터

(시설보수과)

난지물재생센터 최초침전지 보수공사 시행계획

우리센터 최초침전지의 콘크리트 열화 및 노후로 인해 시설물의 보수가 필요한 상태로 적기에 보수공사를 시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

1		추진근거

○ 2019년 정밀점검용역 보고서

2		공사계획

□ 규모 및 현황

구 분	시설년도	규 모	주요 손상	비 고
제1처리장 최초침전지 (24개지)	1987년	폭 11.2m 길이 53.2m	내부에 국부적 열화 현상	2019.12월 기준 순차 보수완료
제2처리장 최초침전지 (24개지)	1997년	폭 11.2m 길이 53.2m	내부 콘크리트 열화, 골재노출, 천막 고정부 콘크리트 박락 및 단면감소	2019.12월 기준 3개지 보수

□ 관련 사진

○ 제2처리장

앙카 설치부 박락, 내부 골재 노출 및 들뜸

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 난지물재생센터 최초침전지 보수공사

○ 사 업 비 : 1,800백만원

○ 공사기간 : 2020.4. ~ 2020.12.

○ 공사내용

- 제2처리장 최초침전지 단면보수(5개지)

※ 2처리장 24개지중 2019.12월 기준 3개지 보수 완료하였으며, 미 보수 21개지 중 상태가 심한 5개소 보수 예정

○ 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비(수선유지비)

□ 단면복구 공법 선정

○ 공법 선정 방법 : 특정기술 선정심사위원회를 2020년 2월 중 개최하여 공법 선정

※ 위원회 개최시 외부전문가를 포함하여 객관적이고 투명한 심사가 되도록 조치 예정

○ 공법선정시 검토내용

- 기존 모체와의 접합력 검토

- 내산성, 내화학성 등 저항성 및 내구성 등 검토

- 보수 시설물 유지관리와 경제성 검토

○ 검토 대상 공법(2019년 정밀점검 용역 제안 공법)

- 붙임 단면보수 공법 비교 참조

□ 발주방법 및 입찰자격

○ 발주방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

○ 입찰참가자격

- 건설산업기본법에 의한 시설물유지관리업 면허 소지자

- 입찰 참가자는 주된 영업소재지가 서울특별시 및 경기도에 소재한 업체이어야 함

○ 특허공법

- 특정공법 선정 심사위원회에서 공법 선정 검토 대상 : 10개 공법

CRM공법, Hi-fer공법, 라파공법, RW-SYSTEM공법, 유니텍공법, MA공법, 에코타라공법, 레미가드공법, HWD공법, H-CRM공법

3		향후 추진계획

○ 2020. 2월 : 특정공법 심사위원회 개최

○ 2019. 3월 : 공사발주 및 계약 심사

○ 2019. 4월~12월 : 계약 및 공사 시행

붙임  1. 공법 비교표 1부.

2. 특허공법심의 검토의견서 1부.

3. 최초침전지 보수 현황 1부.  끝.