보 고 서
			담당	팀장	추모시설운영처장	복지경제본부장
문서번호	추모시설운영처-18383
보존기간	준영구		협 조
결재일자	2019.12.05.
공개여부	공개
제목	설계변경보고(2019년 서울시립승화원 화장로 기능보강 구매설치(1차분))

승화원에서 시행중인 아래의 사업에 대하여 변경사항이 발생하였기에 다음과 같이 설계변경 계획을 보고 합니다.

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 2019년 서울시립승화원 화장로 기능보강 구매설치(1차분)

나. 도 급 비 : 금1,623,390,000원

다. 주요내용 : 주‧재연소로 내화벽돌 교체 3기, 여과집진기 교체 1기 등

라. 사업기간 : 2019. 3. 27 ~ 12. 31

마. 도 급 사 : 합자회사 세화산업사 대표이사 원용식

2. 관련근거

- 추모시설운영처-12762('19.08.23)호, “시립승화원 예산전용 및 낙찰차액 사용 계획(안)”

‧‧‧ ⌜2019 승화원 화장로 유지보수⌟ 국비 감액에 따라 수선유지비 전용 등을 통하여 예산 자체확보

- 추모시설운영처-17633(2019.11.22)호, 실정보고

3. 주요변경내용: 유해가스 촉매교체(증 9기), 2차가스냉각장치 설치(증 1대),

공기혼합냉각기 교체(증 3대), 가스냉각기 청소정비(증 46회) 등

4. 변경금액: 2,024,660,000원(증 401,270,000원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 감
공급가액		640,186,569원	690,503,519원	(증) 50,316,950원
물품 구매	지급자재	658,560,426원	878,779,900원	(증) 220,219,474원
	예비자재	177,062,096원	271,316,581원	(증) 94,254,485원
부가세		147,580,909원	184,060,000원	(증) 36,479,091원
합 계		1,623,390,000원	2,024,660,000원	(증) 401,270,000원

5. 설계변경 내용

공 종		현황 및 문제점	검토의견 (수량변경)	직접공사비 증감 (천원)
화장로 재연소로 내화물 교체		재연소로~공기혼합냉각기 연결 덕트 설치 실제 무게 반영필요	· 덕트 설치무게: 0.848톤 x 3기 → 0.185톤 x 3기	(감) 2,215
로내대차		내화벽돌 로내대차의 강한 열기 방출에 의하여 근무직원들이 어려움을 겪음에 따라 내화벽돌 로내대차 물량을 제외하고, 해당 물량만큼 캐스타블 로내대차로 대체 필요	· 내화벽돌 로내대차: 2대 → 0대 · 캐스타블 로내대차: 63대 → 65대	(감) 1,600
여과집진기 백필터 교체		배출가스처리설비 개선(8호)에 따른 여과집진기 높이 연장(2.5m → 3m) 에 따라 연장된 백필터 적용 필요	· 백필터 및 케이지(3m): 0EA → 64EA	(증) 5,700
가스냉각기 교체		배출가스처리설비 개선(8호) 관련하여 신규 2차가스냉각기를 설치후, 철거된 가스냉각기(2018년 설치)를 21호에 이전설치 필요 ※ 21호 가스냉각기(2011년 설치)는 철거 예정	7대 → 8대	(증) 6,208
가스냉각기 청소정비		가스냉각기 청소 연간 4회 시행 필요	39회 → 85회	(증) 19,020
유인배풍기 정비		유인배풍기 정비수량 정산 필요	3대 → 2대	(감) 830
재연소로 청소		재연소로 청소를 연간 2회 시행 필요	20대 → 41대	(증) 6,049
신관 대기오염방지설비 연소가스덕트 교체		덕트 및 덕트부속품 물량정산 필요	· 덕트교체(D500): 45m → 39.6m · 덕트엘보 교체(D500): 21개 → 23개 · 벨로즈 교체(D500) 7개 → 6개	(감) 4,377
주연소로 단열문 교체		단열문 교체가 시급한 화장로가 없음에 따라 추후 교체시행	1기 → 0기	(감) 5,087
유해가스촉매 교체		2020년부터 대기배출가스 배출기준의 강화 예정임에 따라 교체 주기를 초과한 유해가스 촉매의 교체 필요	· 유해가스 촉매교체: 5기 → 14기 - 압출촉매: 600EA(5대분) → 0EA(0대분) - 코팅촉매: 0EA(0대분) → 1560EA(13대분) - 8호 유해가스촉매장치 전용 압출촉매: 0EA(0대분) → 144EA(1대분)	(증) 165,899
다이옥신촉매 교체		다이옥신 촉매 설치수량에 상응하는 적정 노무비 반영 필요	54EA(3단. 2대분) → 18EA(1단, 2대분)	(감) 2,071
백연방지장치 정비		긴급한 정비 필요사항이 아님에 따라 정비물량 제외후, 정비가 긴급한 설비부터 우선적 정비필요	7대 → 0대	(감) 29,609
공기혼합냉각기 교체		공기혼합냉각기 노후화에 따른 냉각능력 저하에 따라 교체 필요	2대 → 5대	(증) 22,846
가스냉각기 폐열 방출덕트 정비		구관 가스냉각기 폐열 방출덕트에서 방출되는 고온의 열기가 옥상바닥 방수층에 악영향을 미침에 따라 폐열방출 덕트를 지면으로부터 1m 이상 연장하여 설치 필요	· 가스냉각기 폐열 방출덕트 연장: 0대 → 15대	(증) 6,157
화장로 설비 도색 정비		승화원 화장시설에 대한 환경정비를 시행하여 미관 개선 및 청결한 환경 조성 필요	· 가스배관도색: 0㎡ → 130㎡ · 공기배관도색: 0㎡ → 47㎡ · 장비 반입구 난간도색: 0㎡ → 2.4㎡ · 기계실바닥 청소 및 도색: 0㎡ → 692㎡ · 유인배풍기 도색: 0㎡ → 136㎡ · 덕트 도색: 0㎡ → 45㎡	(증) 26,338
2차 가스냉각장치 설치		화장로 배출가스처리설비 개선(8호)과 관련 기존 가스냉각기의 냉각용량 축소 필요(기존 가스냉각기 철거 후, 2차 가스냉각장치 신규설치 필요)	0대 → 1대	(증) 37,965
백연버너 및 관련부품 교체		백연버너의 불완전 연소에 따른 일산화탄소 발생을 제어하기 위하여 백연버너 개선 필요 - 기존대비 용량이 적은 버너를 설치하여 불꽃의 미세조절 시행 ※ 300,000kcal/h → 200,000kcal/h - 실제 유입되는 가스 및 공기의 유량 을 확인할 수 있는 유량계 설치 등	0대 → 1대	(증) 7,009
암모니아 분사노즐 정비		암모니아 공급배관(펌프~노즐구간) 주기적 청소를 통한 암모니아의 원활한 공급 필요(연 3회)	0대 → 69대	(증) 2,267
고재 공제	중량철	화장로 공기혼합기(3대), 화장로 가스배관 부품교체(23대)로 인하여 발생한 물량 반영	5.3톤 → 7톤	(감) 585
	스테인리스	가스냉각기(1대), 대기오염방지설비 연소가스 덕트 교체 물량 반영	19.5톤 → 20.5톤	(감) 1,396
예비자재		분골기날	10EA → 30EA	(증) 1,400
		감속기모터(7.5kW)	1EA → 0EA	(감) 275
		모츄럴모터(M7284Q)	5EA → 6EA	(증) 765
		재받이통(싸이크론 집진기 용)	20EA → 19EA	(감) 1,800
		암모니아 분사노즐	3EA → 6EA	(증) 2,928
		가스냉각기 번호판(STS, 200mm x 200mm)	0EA → 23EA	(증) 918
		화장로 설비 명판(STS, 300mm x 200mm)	0EA → 55EA	(증) 2,743
		수동 관 운반대차(W745 * L2,386 * H990)	0대 → 1대	(증) 6,483
		가스 압력게이지(50A, 1000mmAQ)	0EA → 23EA	(증) 642
		가스 유량계(KOT-F)	0대 → 1대	(증) 1,885
		유인배풍기 임펠러(#4.8, STS304)	0개 → 3개	(증) 13,224
		유인배풍기 커플링(1070TH)	0개 → 2개	(증) 648
		유인배풍기 샤프트 & 베어링	0개 → 2개	(증) 2,982
		유인배풍기 모터(30kW * 2P * 380V)	0개 → 1개	(증) 3,613
		버터플라이 밸브(400A, 수동)	0EA → 7EA	(증) 20,944
		인버터(30kW)	0대 → 8대	(증) 23,313
		인버터(7.5kW)	0대 → 8대	(증) 10,564
		분무관(P4MLH)	0EA → 20EA	(증) 6,400

6. 검토의견 : 상기 설계변경 사항에 대하여 변경계약을 시행코자 함.

붙    임 : 변경내역서 1부.  끝.