문서번호	설비부-1814
결재일자	2020.2.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		代유영선	02/07 임정규
협조

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 공사』

실정보고(C-ITS이설) 검토보고

2020. 02

도시기반시설본부

(설 비 부)

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 공사』

실정보고(C-ITS이설) 검토보고

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 공사』구간 교통섬 철거 예정지에 설치된 C-ITS(차세대 지능형 교통시스템) 장비 이설 방안에 대하여 검토보고함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 공사

□  공사기간 : 2019.10.25. ~ 2021.07.31

□  위    치 : 마포구 상암동 월드컵 교차로 일대

□  총 사업비 : 72,000백만원

□  규    모 : 지하차도 신설(L=540m), 도로확폭(L=582m)

2		이설 추진경위

□ `20.1.15 : 지능형교통시스템 이설 협의(설비부→교통정보과)

□ `20.1.29 : 지능형교통시스템 이설 협의 회신(교통정보과→설비부)

□ 도시기반시설본부에서 주관하여(비용부담) 이설

3		이설 내용

□ C-ITS(차세대 지능형교통시스템) 개요

○ 사업명 : 서울 C-ITS 실증사업(서울시 교통정보과 주관)

○ 사업내용

□ 자율주행 등 미래교통 혁신 기반을 조성하기 위한 인프라 구축

□ 주요서비스(인공지능 기반 교통사고 예측 등) SW개발 및 시험·검증

○ 사업기간 : `18.01 ~ `20.12

○ 총 사업비 : *********

○ 사업시행자 : ******************

□ C-ITS 이설 내용 (단계별 교통처리 계획에 따라 2회 이설)

○ 교통섬 철거에 따른 장비 이설(`20.2월)

○ 교통섬 재설치에 따른 장비 원상복구(`21.7월 예정)

○ 이설 계획도

현황사진 (교통섬 내 설치)	이설(금회 이설분) (교통섬 철거 시 이설)	재이설(`21.7월 예정) (교통섬 재설치 시 이설)

□ 주요내역(금회 이설비용)                                (단위:천원)

공 종	내 역	금 액
케이블 포설	·통신케이블(STP) 증)10m ·전원케이블(F-CV 6sq*2c) 증)15m	증)97
장비설치	·CCTV 설치 증)2대 ·제어함체 설치 증)1대 ·CCTV암 설치 증)1대 ·RSU(노변 기지국) 설치 증)1식	증)2,801
장비철거(재사용)	·CCTV 철거 증)2대 ·제어함체 철거 증)1대 ·CCTV암 철거 증)1대 ·RSU(노변 기지국) 철거 증)1대	증)1,298
직접비 소계		증)4,196
제경비(VAT포함)		증)2,716
공 사 비(발주금액)		증)6,912

□ 재이설(`21.07월 예상)에 대한 시공 방안은 추후 별도 보고

□   건설사업관리자 의견

○ 월드컵경기장 사거리의 교통섬내 위치해 있는 지능형 교통정보시스템               이설에 따른 공사비 관련 수량 및 단가산출에 대하여 검토한 결과 적정하게          산출되었다고 판단됨.

4		보고자 의견

□ C-ITS장비는 본 사업의 설계용역 완료(`18.5월) 후 설치(`19.07월)             되어 이설에 소요되는 내역은 본 공사에 미반영되었으며,

□ 장비 설치 및 운영의 책임소재를 명확히 하기 위해 「서울 C-ITS 실증         사업」을 수행하고 있는 아래 업체와 수의계약함이 적정하다고 판단됨.

[수의계약 내용]

○ 관련근거 : 「지방계약법 시행령」 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우)

○ 발주금액 : 6,912천원

○ 계약업체(예정)

- 업체명 : *******************

- 소재지 : 경기도 성남시 분당구

- 업 종 : 정보통신공사업, S/W 개발 등

붙임 : 1)교통정보과 이설협의 회신 공문 1부.

2)감리단 실정보고 공문 1부. 끝.