문서번호	소방행정과-3762
결재일자	2020.2.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
담당자		자산관리팀장	소방행정과장
김영민		박정경	02/11 이홍섭
협 조
	경리팀장			양철근
	구조대책팀장			정선웅
	담당자			김현석

『광나루수난구조대 신설』

계류장 공사 변경 추진 계획 보고

2020. 2

소 방 행 정 과

광나루수난구조대 계류장 공사 변경 계획

광나루수난구조대 신설에 따른 선박 계류장의 기존 폰툰 방식에서 내구성이 강한 스틸 방식의 구조로 변경하기 위한 추진 계획 보고임.

Ⅰ		추진근거 및 경과

□『광나루 수난구조대 신설 계획』부시장방침 제158호(´18.8.14.)

□『광나루 수난구조대 신설』공사 추진계획(소방행정과-1553/´19.06.14.)

□ 2020회계연도 소방재난본부 성과주의 예산 알림(소방행정과-33951/´19.12.18.)

Ⅱ		사업 개요

□ 공사기간: 2019 .8월 ～ 2020. 6월

□ 위     치: ***********************************

□ 규     모: ***************************************

□ 사 업 비: *************************************

Ⅲ		계류장 현황

○ 계류장 구조 : ***********************

○ 계류장 연면적 : *************

○ 폰툰 형태

Ⅳ		계류장 변경 사유

○ 스틸형 보다 내구성이 약하여 선박 접안시 안전성이 떨어짐

○ 플라스틱 조립형으로 동절기 등 결빙으로 인한 부분 파손 우려

○ 주기적인 정비 및 교체가 필요 유지보수가 어려움

○ 내구성 및 유지관리 등 근본적인 계류장 기능의 안정적 유지 필요

○ 수난구조대의 선박 계류장 변경 요청 의견 반영

Ⅴ		세부 변경 계획

□ 계류장 변경

○ ******************************

□ 공사규모

○ 당  초 : 폰툰 조립식 구조 면적*******************

○ 변  경 : 철재 바지선 구조 면적 *****************

- 마름모형 구조(부유물 잔류 제거), 소규모 창고, 간이호이스트, 도교 등

⇨

<당초 설계안>                      <변경 설계안>

Ⅵ		예산 및 계약 현황

□ 소요예산 : *********

□ 공사내용 : 설계 및 바지선 등 제작 공사비

(단위: 천원)

구 분	***	*******	*****
예 산 액	******	*******	*******

□ ***********************************

□ *******************************************

□ ***************************************

Ⅶ		공사 발주

□ 사업기간 : 2020.2 ~ 5월

□ 계약방법 : 설계변경

□ 관련근거

○「(계약예규)공사계약 일반조건」제 19조(설계변경 등)

○ 2020회계연도 소방재난본부 성과주의 예산 알림(소방행정과-33951/´19.12.18.)

- 2020년 성과주의 예산 광나루수난구조대 신설 예산 추가 배정*****

○ 119특수구조단 광나루수난구조대 계류장 변경 요청(수난구조대-467/’20.2.7)

Ⅷ		향후 추진계획

○ 계류장 재설계 : 2월~3월(선박 전문설계 업체 수의계약/소액)

○ 계약 심사 : 3월중(계약심사과)

○ 계약 변경 : 3월중(자제 변경 계약)

○ 공사 시행 : 3월 ~ 5월중(준공)