문서번호	기술심사담당관-3453
결재일자	2020.2.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술지원팀장	기술심사담당관
오광원		조임남	02/14 권완택
협 조
	심사총괄팀장			류용열
	기술관리팀장			이상석
	주무관			이희태

남부순환로(개봉1동사거리 주변) 평탄화공사 보완설계 설계경제성(VE) 검토 실행계획

2020. 02.

기술심사담당관

- 남부순환로(개봉1동사거리 주변) 평탄화공사 보완설계 -

설계경제성(VE) 검토 실행계획

「남부순환로(개봉1동사거리 주변) 평탄화공사 보완설계 용역」에 대해 설계경제성검토 소위원회를 구성하고, 설계경제성(VE) 검토를 추진하고자 함

1		추진 근거

□ 건설기술진흥법 시행령 제75조

□ '20년 설계경제성 검토 운영계획(행정부시장 방침 제17호, '20.1.29.)

□ 설계경제성 검토 요청(도시기반시설본부 토목부-1286, '20.1.17.)

2		요청사업 개요

************************************

**************************************************

******************************************************

*****************************************************

****************************************

**********************************************************

*****************

3		운영협의회 협의사항

□ 운영협의회 구성

○ 위원장 : 기술심사담당관

○ 간  사 : 기술지원팀장

○ 위  원 : 심사총괄팀장, 기술관리팀장

□ 운영협의회 검토회의

○ 검토일시 : '20.2.13.(목) 09:30

○ 검토내용

- 「건설기술 진흥법 시행령」제75조 2항에 명시된 설계경제성(VE) 검토 대상 사업(총공사비 100억원 이상인 건설공사의 총공사비 또는 공종별 공사비를 10퍼센트이상 설계변경 시)으로 검토함이 타당함.

□ 운영협의회 협의결과 :  기술심사담당관 대행검토 시행

4		설계 경제성검토(VE) 계획

□ 주요 검토내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성 등

□ 추진 방법 : 설계경제성검토 소위원회 구성 및 설계경제성 검토

○ 설계경제성검토소위원회, 발주부서, 설계사 등 20명 내외 참여

구 분	구 성 원	역 할
총 괄	▸위원장 권완택 기술심사담당관 ▸간 사 조임남 기술지원팀장 ▸설계VE 담당 오광원주무관, 이희태주무관	․설계VE 계획, ․회의 지원 등
리 더	▸김동하 ㈜동해종합기술공사	․워크숍 준비, 진행 ․결과보고서 작성
진행보조요원	▸최승호 ㈜동해종합기술공사	․워크숍 준비, 보조 ․결과보고서 작성보조
외부 검토위원 (5개 분야)	▸(도 로) 이수현 위원 ㈜유신 ▸(토목구조) 엄종욱 위원 케이에스엠기술(주) ▸(토목시공) 안삼현 위원 ㈜진우엔지니어링 ▸(토 질) 박인철 위원 ㈜경동엔지니어링 ▸(상하수도) 김용순 위원 ㈜이산	․기능 분석 ․기술 검토 ․아이디어 제안 및 평가 ․제안서 작성
발주부서	▸도시기반시설본부 토목부 이한규 주무관	․사업설명, 제안서 검토
설계자	▸문흥식 이사 ㈜동일기술공사	․사업설명회 준비 ․제안서 원가분석 등

□ 설계VE 회의 세부일정

일 시	내 용
′20.2.27.(목) 10:00~17:00	- 사업설명 및 질의응답, 현장답사, 성능평가, 기능분석 ‣ 장소 : 도시기반시설본부 회의실
′20.3.6.(금) 10:00~17:00	- 검토회의 : 성능평가, 아이디어 창출 및 개략평가 ‣ 장소 : 도시기반시설본부 회의실
′20.3.13.(금) 10:00~17:00	- 검토회의 : 구체화검토 및 발표, 아이디어 평가, 대안선정 ‣ 장소 : 기술심사담당관 회의실
'20.3.16.(월)	- VE 제안서 통보(채택여부 요청) (기술심사담당관 ⇒ 도시기반시설본부 토목부)
'20.3.23.(월)	- VE 제안 채택결과 회신 (도시기반시설본부 토목부 ⇒ 기술심사담당관)
'20.3.30.(월)	- 설계경제성(VE) 검토 결과 통보 (기술심사담당관 ⇒ 도시기반시설본부 토목부)

□ 설계경제성 검토 시행절차

구분		추진 일정		수행 절차		추진 내용
설 계 경 제 성 검 토 (VE) 운 영		'20.2.27. ~ '20.3.13. (1일차~16일차)		설계VE 검토회의 【설명회,워크숍,이행회의】 (설계경제성검토소위원회)		▸ 자료 사전검토 ▸ 사업설명 및 현장답사 ▸ 1,2,3차 워크숍 - 대안발굴, 제안서 작성 - 설계예산서 검토 - 설계제안 채택회의
		'20.3.16. (19일차)		VE 제안서 통보 (기술심사담당관 → 발주부서)		▸설계경제성(VE) 검토 제안서 통보
		'20.3.23. (26일차)		VE 제안 채택결과 회신 (발주부서 → 기술심사담당관)		▸설계경제성(VE) 검토 제안서 수용 여부 결정 및 통보
		'20.3.24. ~ '20.3.29. (32일차)		설계VE 검토 결과보고서 작성 (설계경제성검토소위원회)		▸설계경제성(VE) 검토 최종 결과보고서 작성 및 검토
		'20.3.30. (33일차)		설계VE 검토결과 통보 (기술심사담당관 → 발주부서)		▸설계경제성(VE) 검토 결과 통보

5		소요 예산(안)

*******************************

*********************

********************************************

************************************************

******************************************

************************************************************

**********************

□ 지급부서

○ 위원  수당 : 요청부서(도시기반시설본부 토목부)

○ 회의운영비 : 기술심사담당관

6		향후 계획

□ 설계경제성(VE) 검토 결과 통보 : '20.3.30.

붙임: 설계경제성(VE) 검토 신청서 1부.  끝.