진선미 의원(보건복지위원회, 더불어민주당)

요구번호: 150번

○ 서울시 강동갑 지역(길동, 명일동, 상일동, 암사동, 고덕동, 강일동)에서 서울주택도시공사가 현재 수행중인 주택건설사업 현황

□ 서울도시공사가 강동갑 지역에서 추진 중인 주택건설 사업 현황은 다음과 같습니다.

사업명	사업면적 (천㎡)	세대수			주택건설사업승인 (년/월)	착공/준공 (년/월)
		계	분양	임대
고덕강일공공주택지구 4단지	45	1,239	642	597	2017.02	2017.12 / 2020.06
고덕강일공공주택지구 6단지	48	1,244	-	1,244	2017.02	2017.12 / 2020.07
고덕강일공공주택지구 7단지	38	1,025	-	1,025	2017.02	2017.12 / 2020.08
고덕강일공공주택지구8단지	35	946	526	420	2017.02	2018.06 / 2020.11
고덕강일공공주택지구 9단지	13	366	-	366	2017.02	2018.09 / 2020.10
고덕강일공공주택지구 11단지	14	600	-	600	2016.12	2018.09 / 2020.12
고덕강일공공주택지구 13단지	24	675	-	675	2017.02	2019.05 / 2021.10
고덕강일공공주택지구 14단지	29	943	411	532	2017.12	2018.09 / 2020.11

첨부 : 사업지구별 세부현황 1부

작성자	기관명 ( 건설사업부 )	직 위
	서울주택도시공사 (건설사업부)	담당부장	이종영
	☎3410-8910	담당자	허은영
	작 성 일 : 2020. 2. 10.

[첨부. 사업지구별 세부현황]

1	고덕강일 공공주택지구 4단지

□ 사업개요

○ 위    치: 서울특별시 고덕강일 공공주택2지구 내 4단지(강일동 114번지 일원)

○ 주택건설: 아파트 10개동 / 지하2층, 지상24층 / 1,239세대

○ 사업면적: 45,390㎡

○ 사업기간: 2017.12. 29 ~ 2020. 6. 30

□ 주택건설 계획

구 분	평형별 세대수(전용기준)							비 고
	계	39㎡이하	49㎡	59㎡	74㎡	84㎡	101㎡
계	1,239	-	-	-	-	-	-
분 양	642	-	345	297	-	-	-
국민임대	396	396	-	-	-	-	-
장기전세	201	-	-	158	20	23	-
행복주택	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진경위 및 계획

○ 2017. 12. 29.: 착공일

○ 2020. 2. 10.(현재): 마감공사(공정률 86.49%)

○ 2020. 6. 30.: 준공예정일

○ 2020. 8. 30.: 입주예정일

2	고덕강일 공공주택지구 6단지

□ 사업개요

○ 위    치: 서울특별시 고덕강일 공공주택2지구 내 6단지(강일동 215번지 일원)

○ 주택건설: 아파트 15개동 /지하1층, 지상5~21층 / 1,244세대

○ 사업면적: 48,269㎡

○ 사업기간: 2017.12. 29 ~ 2020. 7. 9.

□ 주택건설 계획

구 분	평형별 세대수(전용기준)							비 고
	계	39㎡이하	49㎡	59㎡	74㎡	84㎡	101㎡
계	1,244	-	-	-	-	-	-
분 양	-	-	-	-	-	-	-
국민임대	689	346	343	-	-	-	-
장기전세	555	-	-	473	40	42	-
행복주택	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진경위 및 계획

○ 2017. 12. 29.: 착공일

○ 2020. 2. 10.(현재): 마감공사(공정률: 95.90%)

○ 2020. 7. 9.: 준공예정일

○ 2020. 9. 9.: 입주예정일

3	고덕강일 공공주택지구 7단지

□ 사업개요

○ 위    치: 서울특별시 고덕강일 공공주택2지구 내 7단지(강일동 91번지 일원)

○ 주택건설: 아파트 2개동 / 지하1층, 지상20층 / 1,025세대

○ 사업면적: 37,598㎡

○ 사업기간: 2017.12. 29 ~ 2020. 8. 14

□ 주택건설 계획

구 분	평형별 세대수(전용기준)							비 고
	계	39㎡이하	49㎡	59㎡	74㎡	84㎡	101㎡
계	1,025	-	-	-	-	-	-
분 양	-	-	-	-	-	-	-
국민임대	619	348	271	-	-	-	-
장기전세	406	-	-	343	29	34	-
행복주택	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진경위 및 계획

○ 2017. 12. 29.: 착공일

○ 2020. 2. 10.(현재): 마감공사(공정률: 90.12%)

○ 2020. 8. 14.: 준공예정일

○ 2020. 10. 14.: 입주예정일

4	고덕강일 공공주택지구 8단지

□ 사업개요

○ 위    치: 서울특별시 고덕강일 공공주택2지구 내 8단지(강일동 66번지 일원)

○ 주택건설: 아파트 12개동 / 지하2층, 지상4~22층 / 946세대

○ 사업면적: 34,677㎡

○ 사업기간: 2018. 6. 11. ~ 2020. 11. 22.

□ 주택건설 계획

구 분	평형별 세대수(전용기준)							비 고
	계	39㎡이하	49㎡	59㎡	74㎡	84㎡	101㎡
계	946	-	-	-	-	-	-
분 양	526	-	242	284	-	-	-
국민임대	318	306	12	-	-	-	-
장기전세	102	-	-	58	22	22	-
행복주택	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진경위 및 계획

○ 2018. 6. 11.: 착공일

○ 2020. 2. 10.(현재): 마감공사(공정률: 58.20%)

○ 2020. 11. 22.: 준공예정일

○ 2021. 1. 22.: 입주예정일

5	고덕강일 공공주택지구 9단지

□ 사업개요

○ 위  치: 서울특별시 고덕강일 공공주택3지구 내 9단지(강일동 산 22-36번지 일원)

○ 주택건설: 아파트 2개동 / 지하1층, 지상15층 / 366대

○ 사업면적: 12,615㎡

○ 사업기간: 2018. 9. 3. ~ 2020. 10. 4.

□ 주택건설 계획

구 분	평형별 세대수(전용기준)							비 고
	계	39㎡이하	49㎡	59㎡	74㎡	84㎡	101㎡
계	366	-	-	-	-	-	-
분 양	-	-	-	-	-	-	-
국민임대	255	160	95	-	-	-	-
장기전세	111	-	-	111	-	-	-
행복주택	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진경위 및 계획

○ 2018. 9. 3.: 착공일

○ 2020. 2. 10.(현재): 마감공사(공정률: 70.81%)

○ 2020. 10. 4.: 준공예정일

○ 2020. 12. 4.: 입주예정일

6	고덕강일 공공주택지구 11단지

□ 사업개요

○ 위  치: 서울특별시 고덕강일 공공주택3지구 내 11단지(강일동 36-3번지 일원)

○ 주택건설: 아파트 3개동 / 지하2층, 지상8~22층 / 600세대

○ 사업면적: 13,500㎡

○ 사업기간: 2018. 9. 3. ~ 2020. 12. 19.

□ 주택건설 계획

구 분	평형별 세대수(전용기준)							비 고
	계	39㎡이하	49㎡	59㎡	74㎡	84㎡	101㎡
계	600	-	-	-	-	-	-
분 양	-	-	-	-	-	-	-
국민임대	-	-	-	-	-	-	-
장기전세	-	-	-	-	-	-	-
행복주택	600	600	-	-	-	-	-

□ 추진경위 및 계획

○ 2018. 9. 3.: 착공일

○ 2020. 2. 10.(현재): 골조공사(공정률 51.62%)

○ 2020. 12. 19.: 준공예정일

○ 2021. 2. 19.: 입주예정일

7	고덕강일 공공주택지구 13단지

□ 사업개요

○ 위  치: 서울특별시 고덕강일 공공주택3지구 내 13단지(상일동 산2-3번지 일원)

○ 주택건설: 아파트 10개동 / 지하2층, 지상6~22층 / 675세대

○ 사업면적: 24,211㎡

○ 사업기간: 2019. 5. 2. ~ 2021. 10. 10.

□ 주택건설 계획

구 분	평형별 세대수(전용기준)							비 고
	계	39㎡이하	49㎡	59㎡	74㎡	84㎡	101㎡
계	675	-					-
분 양	-	-	-	-	-	-	-
국민임대	336	252	84	-	-	-	-
장기전세	339	-	-	339	-	-	-
행복주택	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진경위 및 계획

○ 2019. 5. 2.: 착공일

○ 2020. 2. 10.(현재): 지정공사(공정률 8.39%)

○ 2021. 10. 10.: 준공예정일

○ 2021. 12. 10.: 입주예정일

8	고덕강일 공공주택지구 14단지

□ 사업개요

○ 위  치: 서울특별시 고덕강일 공공주택3지구 내 14단지(강일동 28번지 일원)

○ 주택건설: 아파트 9개동 / 지하1~2층, 지상8~14층 / 943세대

○ 사업면적: 29,375㎡

○ 사업기간: 2018. 9. 3.~2020. 11. 9.

□ 주택건설 계획

구 분	평형별 세대수(전용기준)							비 고
	계	39㎡이하	49㎡	59㎡	74㎡	84㎡	101㎡
계	943	-	-	-	-	-	-
분 양	411	-	206	205	-	-	-
국민임대	179	179	-	-	-	-	-
장기전세	-	-		-	-	-	-
행복주택	353	353	-	-	-	-	-

□ 추진경위 및 계획

○ 2018. 9. 3.: 착공일

○ 2020. 2. 10.(현재): 골조공사(공정률 59.82%)

○ 2020. 11. 9.: 준공예정일

○ 2021. 1. 9.: 입주예정일