문서번호	급수운영과-16229
결재일자	2014.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
남상욱		김태형	07/07 代김태형
협조

2014년 간선배관공사 구간 변경

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

동부수도사업소

2014년 간선배관공사 구간 변경

2014년 간선배관공사 대상 중 일부가 도로굴착 통제 및 ‘14년 배급수관정비공사에 포함되어 구간 변경이 불가피함에 따라 대체구간을 선정하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

관련근거

❍ 급수설비과-1258(‘14.2.28, “2014년 간선배관사업비 배정계획”)

‘14년 간선배관공사 현황(급수운영과)

연번	공 사 명	공사개요		배정예산 (백만원)	비 고
		구경 (mm)	연장 (m)
1	구의동553~559번지간 간선배관공사	150	203	122
2	자양동770번지 일대 간선배관공사	150	75	45
3	중곡동53~54번지간 간선배관공사	200	100	70
4	금호동2가1208-1~501-32간 간선배관공사	150	200	120
5	금호두산 APT 급수공급체계변경	200~300	40	120

간선배관공사 시공불가 사유

연번	공 사 명	공사개요		배정예산 (백만원)	변경 사유
		구경 (mm)	연장 (m)
1	자양동770번지 일대 간선배관공사	150	75	45	도로굴착통제 및 일부 사유지 포함
2	중곡동53~54번지간 간선배관공사	200	100	70	자양동625번지외6개소 세척갱생관정비공사에 포함

간선배관공사 구간변경 계획

❍ 상기 불가 사유에 의거 자양동 770번지외 1개소는 공사시행이 불가함으로 대체 구간을 선정하여 본부 심사 요청.

❍ 대체구간 현황

- 위    치 : 광진구 군자동 49-1 ~ 79-1

- 공사개요 : D=150㎜, L=160m

- 선정사유

․ 기존관 현황 : 1985/DCIP/φ80

․ 군자동 49-1 ~ 79-1번지 골목은 배수관이 80mm로 배수관경이 협소하고 주거밀집지역으로 최근에 도시형 생활주택 등 건축 증가로 인한 급수 수요가 증가하므로 소출수 민원 발생으로 배수관경 확대 필요.

․ 주변 배관(D300, D100㎜)과의 순화배관망 형성을 위한 관경확대가 필요

행정사항

❍ 2014년 간선배관공사 대체구간에 대하여 본부 급수설비과에 심사 요청

별첨 : 간선배관공사 현황카드(본부 심사용) 1부.  끝.