[별지 제3호 서식]

담당자	기관(실∙국명)	직 책	성 명	연락처
	강동구청 (치수과)	건설교통국장	김영철	3425-7150
		치수과장	백광인	3425-7155
		담당자	박장용	3425-6403

1-1. 강동구 하수관로 신설 및 개량공사 (계속)

(백만원)
구 분	2018 결산	2019년		2020년		증 감 (B-A)
		당초	수정 (A)	요구	조정 (B)		%
ㅇ강동구 하수관로 신설 및 정비공사	7,036	6,506	6,506	9,939

1. 사업개요

□ 사업목적

ㅇ 강동구 관내 통수능 부족 관로의 성능을 개선하여 침수를 최소화 하고 노후된 하수관을 개량하여 한강수질 오염 및 토양오염 방지

□ 사업내용

구 분	내 용
사업기간	‘20.2～'20.12
총사업비1」	99억원( 99억원)
사업규모2」	- 하수도구조물 정비공사 D=300~1,200㎜, L=360m, 불량맨홀 30개소 하수암거 신설 ▣2.5×2.0m~▣1.5×2.0m, L=350m - 노후 불량 하수관로 종합정비 D=300~1,500㎜, L=2,000m - 노후 하수암거 정비공사 ▣1.5~3.5m, A=9,338㎡
지원조건3」	직접수행( 총사업비의 24% 지원)
사업시행주체	서울특별시 강동구청(치수과)

2. ’20년 요구내용

□ 요구내용 및 산출근거

ㅇ 2020년 요구사업량

- 하수관거 정비 : D=300~1,500㎜, L=2,360m, 맨홀정비 30개소

- 하수암거 신설 : ▣2.5×2.0m~▣1.5×2.0m, L=350m

-하수암거 정비 : ▣1.5~3.5m, A=9,338㎡

※ ‘19년 계획 대비 달라지는 ’20년 요구 내용

구 분	’19계획		’20요구
□ 사업명
▪ 하수도구조물 정비 및 불량맨홀 정비공사	하수관정비 및 불량맨홀 정비 D=300~1,200㎜, L=360m 불량맨홀 30개소 사업비 : 393백만원		하수시설물 정비 및 불량맨홀 정비 D=300~1,200㎜, L=360m 불량맨홀 30개소 사업비 : 393백만원
▪ 둔촌로 하수암거 신설공사	하수암거신설(건설사업관리 용역포함) ▣2.5×2.0m, L=205m 사업비 : 4,502백만원		하수암거신설(건설사업관리 용역포함) ▣2.5×2.0m, L=350m 사업비 : 5,760백만원
▪ 노후불량 하수관로 종합정비	하수관개량 D=300~1,500㎜, L=200m 사업비 : 241백만원		하수관개량 D=300~1,500㎜, L=2,000m 사업비 : 2,526백만원
▪ 노후 하수암거 정비공사	하수관로 보수보강 ▣1.5~3.5m A=9,338㎡(단면보수) 사업비 1,260백만원		하수관로 보수보강 ▣1.5~3.5m A=9,338㎡(단면보수) 사업비 1,260백만원
▪ 천중로50길 일대외 3개소 하수관로 정비공사	하수관정비 D=900~1,200㎜, L=274m 사업비 : 110백만원		사업완료

□ 지원 필요성

ㅇ 한강상수원(암사취수장) 수질오염 방지

ㅇ 토양오염 방지

3. 검토의견【기획재정부 작성】

***세부내역표는 검토 및 증감을 제외하고 부처에서 작성

□

ㅇ

< 세부 내역 >

					(백만원)
구 분	’18결산	’19계획 (A)	’20계획(안)		증 감 (B-A)
			요구	검토(B)
						%
□ 사업명
▪ 하수도구조물 정비 및 불량맨홀 정비공사	284	393	393
▪ 둔촌로 하수암거 신설공사	2,526	4,502	5,760
▪ 노후불량 하수관로 종합정비	2,622	241	2,526
▪ 노후하수암거 정비공사	-	1,260	1,260

※ 물량, 단가, 보조율 등 산출근거를 명확하게 작성

4. 중기재정 소요전망(’19～’23) ( * 1page 이내로 작성 )

□ 사업운영 기본방향

***********************************

□ 중기재정 소요 및 산출근거

						(억원)
구 분	‘18~’22 중기계획* (A)	‘19~’23 중기계획(안)				증 감 (B-A)
		요 구		검 토
		금액	산 출 근 거**	금액(B)	산 출 근 거**
’18	7,036	7,036	하수관 정비 - D=300~1,200mm, - L=3,467
‘19	6,506	6,506	하수관 정비 및 신설 - D=300~1,500mm, - L=2,839m - A=9,338㎡(단면보수)
‘20	9,939	9,939	하수관 정비 및 신설 - D=300~1,500mm, - L=2,710m - A=9,338㎡(단면보수)
‘21	4,500	4,500	하수관 정비 - D=300~1,500mm, - L=2,360m - A=9,300㎡(단면보수)
‘22	4,500	4,500	하수관 정비 및 신설 - D=300~1,500mm, - L=2,556m - A=9,300㎡(단면보수)
‘23	4,500	4,500	하수관 정비 및 신설 - D=300~1,500mm, - L=2,360m - A=9,300㎡(단면보수)
연평균 증가율 (%)

5. 고려사항

(1) 지원근거 및 추진경위

ㅇ 지원근거

- 「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제 22조 및 한강수계관리기금 운용규칙

※ 총사업비의 100분의 24(특별대책지역 외의 총사업비에 대한 기금지원비율)를 지원한다

- 하수관거 정비 조사 및 기본 설계 : 2000. 8.

ㅇ 추진경위

- 2020. 01. : 공사 설계

- 2020. 02. : 설계 심사 및 사전절차 이행

- 2020. 03. : 공사 착공

- 2020. 12. : 공사 준공

< 반영 추이 >
					(억원)
사업명	’15계획		’16계획			’17계획	’18계획	’19계획
ㅇ강동구 하수관로 정비 및 신설공사	15		66			70	70	65

(2) 최근 3년간 계획변경, 이월․불용실적 (* 필수 작성사항)

ㅇ 둔촌로 하수암거 신설공사 2공구(1차) 사업의 적격심사 과정에서 이견이 발생하여 시일이 상당히 소요되어 절대공기가 부족하였으며, 기존연장 612m에서 548m로 설계변경됨에 따라 나머지 사업비를 이월함

							(억원)
년도	당초계획 (A)	전년이월 (B)	계획변경 (C)	현액 (A+B+C)	집행	차년이월	불용
’16년	66			66	55	10
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
’17년	70	10		80	61	18	1
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
’18년	65	18		83	80	3
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )