공  사  설  명  서

□ 공사위치 : 2개구 [노원구, 도봉구]

□ 공사기간 : 착공일로부터 ～ 2020. 12. 31

□ 총공사비 : 520,000,000원

○ 도 급 비 :   480,000,000원

○ 이 전 비 :    40,000,000원

□ 공사개요

○ 교통신호기 설치 및 보수공사 1식

- 신호제어기, 신호등, 신호지주 외 기타

□ 공사목적

○ 본 공사는 관내 교통신호기의 설치 및 보수를 통해 도로를 이용하는 시민에게 쾌적한 교통 환경을 제공하고자 함.

□ 공사 예정공정표

일 정 공 종	착공일로부터 ~ 2020.12.31까지																																			비고
	2월			3월			4월			5월			6월			7월			8월			9월			10월			11월			12월
착공 및 기자재 준비
제어기 신설 및 교체
신호등 신설 및 교체
지주 신설 및 교체
케이블교체 및 기타
공 정 율(%)	5			5			10			15			15			5			5			10			10			10			10
누 계 공 정 율(%)	5			10			20			35			50			55			60			70			80			90			100