	중랑소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	망우119안전센터 재건축 공사 발주 계획

1. 소방행정과-1048(2020.02.03.)호 『2020년 주요 예산사업 추진계획』와 관련입니다.

2. 준공 34년이 경과된 노후청사로 안전성 및 열악한 근무환경 개선을 위한 중랑소방서 망우119안전센터 재건축 공사 발주를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 중랑소방서 망우119안전센터 재건축 공사

나. 공사규모 : 철근 콘크리트 구조 4/1층 연면적 899.08㎡

다. 소요예산 : 금2,164,071천원(금이십일억육천사백칠만일천원)

라. 계약방법

구 분		종합공사 (건축,토목,기계,가스,조경)	전기공사	통신공사	소방공사	비고
예산		금1,763,390,000원 ․ 공사비 : 1,475,690,000 ․ 관급자재 : 287,700,000	금239,553,000원 ․ 공사비 : 173,741,065 ․ 관급자재 : 65,811,935	금140,566,000원 ․ 공사비 : 126,647,379 ․ 관급자재 : 13,918,621	금20,562,000원 ․ 공사비 : 20,562,000	분리발주
계약방법		적격심사	적격심사	적격심사	전자공개 수의계약
입찰 참가자격	면허	종합건설업 중 건축공사업 종합건설업 중 토목건축공사업	전기공사업	정보통신공사업	전문소방시설공사업 일반소방공사업(기계․전기)
	지역	서울지역제한	서울지역제한	서울지역제한	서울지역제한
공사기간		착공일로부터 210일	착공일로부터 220일	착공일로부터 220일	착공일로부터 220일

※ 관급자재 : 발주자가(중랑소방서) 조달청 구매(관급자재비 금367,430,556원)

구 분	종합공사(건축,토목,기계)			전기공사	통신공사	비고
	건축	토목	기계
예산	금225,335,000원	금3,441,000	금58,924,000원	금65,811,935원	금13,918,621원	종합공사 (가스,조경) 소방공사 해당없음
내용	시멘트, 레미콘, 창호 철근콘크리트용봉강	레미콘, 이형철근	냉난방기설치공사 전열교환기설치공사	조명기구, 분전반	CCTV, MDF, 전관방송

마. 예산과목 : 소방행정기반강화/직무환경개선/119안전센터재건축등/시설비

바. 하자보증기간 : 지방계약법 시행규칙 제68조 규정에 의함

붙 임   망우재건축 공사 발주 계획 1부.  끝.

담당자	오승민		장비회계팀장	위성매		소방행정과장	조경현		소방서장	03/02 최성희
협조자
시행	소방행정과-2275	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang
전화	02)6981-8821	/전송	02)3423-2035	/	othingzzang@seoul.go.kr	/	부분공개(5)