기계설비 분리발주현장 안전 및 품질점검 일정(안)

○ 대상현장 : 14개소

(2020년도)

연번	점검월	공 사 명	시공사	규 모	공사기간	공사금액 (백만원)	공정률 (%)	추진중인 공사내용	비 고
1	6	탄천물재생센터 총인처리시설 기계설비공사	㈜이수에이치앤씨 외 2	·총인처리시설 2개소 45만톤/일	’17.11.~’21.04.	1,837	31	작업 없음 (4월부터 진행 예정)	열빛총괄과 (나경운)
2	5	중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사	대원엠이씨(주)	·총인처리시설 41.2만톤/일	’17.11.~’20.06.	2,478	48	·유입동·공동구 천장 배관 및 박스 매입	열빛총괄과 (양우창)
3	4	서남물재생센터 총인처리시설 기계설비공사	대윤환경(주)	·총인처리시설 737,000`m3/일	’17.06~’21.04.	5,289	67	·수문, 펌프 설치 ·각종 배관공사	환경설비과 (이호기)
4	3	서울공예박물관 조성 기계공사	㈜거륜에너택	·대지면적 13,839㎡ ·6개동/연면적 10,590㎡	’18.06~’20.09.	4,205	53	·소화배관 보온작업 ·공조실 덕트 설치	환경설비과 (이지영)
5	10	G밸리 근로자 문화복지센터 건립 설비공사	㈜다원이엔에스	·지하2층~지상10층 ·연면적 5,958㎡	’18.04.~’20.07. (연기예정)	1,976	3	·스리브 설치	건축설비과 (조윤제)
6	10	서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사	덕신건업(주) 외 3	·지하3층 ·연면적 3,645㎡	’19.04.~’20.10. (연기 예정)	3,037	25	·소화배관 설치 ·공조배관 및 덕트 설치	건축설비과 (마권택)
7	11	세운상가 재생사업 공공공간 조성 기계설비공사	㈜태건기계	·구간별 데크 신설 및 정비 ·보행교 등 조성	’19.03.~’20.11. (연기 예정)	1,468	3	작업 없음 (3월부터 진행 예정)	건축설비과 (마권택)
8	7	남산예장자락 재생 기계설비공사	㈜지정이앤씨 외4	· 공원 16,373㎡ · 주차장 16,992㎡	’17.01~’20.12.	1,784	12	· 우수배관, 기계실 배관작업	녹색성장과 (추한영)

※ 점검일정은 공사 여건에 따라 변경 될 수 있음.

연번	점검월	공 사 명	시공사	규 모	공사기간	공사금액 (백만원)	공정률 (%)	추진중인 공사내용	비 고
9	6	동자동 쪽방주민지원시설 리모델링 기계설비공사	을묘종합건설(주)	·지하2층, 지상4층 ·연면적 588.88㎡	’19.12~’20.07.	105	0	· 착공준비 (3월부터 진행 예정)	녹색성장과 (정인석)
10	12	시립마포 실버케어센터 건립공사	㈜동화이엔씨 외4	·지하2층, 지상4층 ·연면적 12,271㎡	’19.04~’21.12.	2,931	1	· 도시가스 외부배관 작업	녹색성장과 (추한영)
11	12	금천소방서 건립 기계설비공사	-	·지하1층, 지상6층 ·연면적 5,177㎡	’20.03~’21.07.	1,242	0	· 발주준비 (9월부터 공사 진행 예정)	녹색성장과 (정인석)
12	4	스페이스 살림 조성 기계공사	㈜한성기술개발 외2	·지하2층, 지상7층 ·연면적 17,621㎡	’18.09~’20.06. (연기 예정)	5,537	78	· 위생, 공조, 소화배관 등	시책사업과 (박성수)
13	5	동북권 세대융합형 건립 기계공사	㈜GS네오텍	·지하2층, 지상5층 ·연면적 17,745㎡	’18.09~’20.09.	4,328	47	· 위생, 공조, 소화배관 등	시책사업과 (박성수)
14	11	평창동 미술문화 복합공간 건립 기계공사	㈜한난엔지니어링 외1	·지하1층, 지상5층 ·연면적 5,590㎡	’19.12~’21.08.	1,466	0	· 공사준비 (5월부터 진행 예정)	시책사업과 (박성수)
		이하빈칸

※ 점검일정은 공사 여건에 따라 변경 될 수 있음.