설계변경(3차) 심의 소위원회
○ 일시 : 2020년 4월 13일(월) 14:00 ○ 장소 : 전자결재 서면 심의 ○ 안건 : 2019년 서강동외 7개동 상수도 공사 설계변경(3차) 심의 ○ 설계변경사유 : 공사시행에 따른 물량증감 및 신규공종 발생 ○ 심의 결과
위 원	직 위	성 명	서 명	의 견
위 원 장	급수운영과장	이병운	04/13 이병운	적정함
위 원	급수관리팀장	김승완	김승완	적정함
위 원	시설운영팀장	김용만	김용만	적정함
위 원	급수운영팀장	김찬모	김찬모	적정함
간 사	주무관	김승진	김승진

2020. 4. 13.

서부수도사업소 심의위원회

공사 설계변경(3차) 심의 설명서

공사명	2019년 서강동외 7개동 상수도공사 (장기계속단가계약)

부 서 명	서부수도사업소(급수운영과)
작 성 자	김 승 진
제출년월일	2020. 4. 13.

설 계 변 경(3차)  심 의 설 명 서

□ 공사 현황

□ 공 사 명 : 2019년 서강동외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)

□ 공사개요 : 당초 - D=13~300㎜, L=2,160m

변경 - D=13~300㎜, L=2,160m

□ 공사기간 : 2019.06.10. ~ 2020.06.30.

□ 계약금액 : 655,976,530원

□ 도 급 자 : ㈜화랑건설 대표 박순임

□ 설계변경 사유

□ 신규공종 발생 및 시공에 따른 물량증감

- 신규 공종 : 아스팔트 포장전단(200m)외 18개 공종(낙착율 86.745% 적용)

연번	공종	규격	단위	단가	비고
1	아스팔트 포장절단	200m이하(지세+야간)	m	1,492원
2	인력 터파기	견질토사, 0-1m	㎥	59,491원
3	인력 터파기(용수,협소)	견질토사, 1-2m	㎥	120,128원
4	아스팔트 포장깨기	굴삭기(타이어)0.18㎥	㎥	28,508원
5	파쇄물 걷기 및 싣기	굴삭기(타이어)0.18㎥,야간	㎥	13,065원
6	터파기(기계100%)-불량	굴삭기(타이어)0.18㎥,야간	㎥	16,783원
7	되메우기(기계100%)-보통	굴삭기(타이어)0.18㎥,야간	㎥	3,755원
8	되메우기(기계100%)-양호	굴삭기(타이어)0.18㎥,야간	㎥	2,352원
9	기계다짐(보통)	램머80kg	㎥	10,590원
10	기계다짐(양호)	램머80kg	㎥	7,565원
11	A-파쇄물운반(0.18)	4.5DT(현장⇒집하장)	㎥	18,694원
12	잔토소운반(0.18)	4.5DT(현장⇒집하장)	㎥	15,701원
13	환토소운반	4.5DT(현장⇒집하장)	㎥	11,409원
14	철개굴상(하) 및 교체공	원형 및 사각맨홀	개소	175,427원
15	안전시설설치 및 철거	간선(배관-손료)	일	62,092원
16	경광등설치 및 철거	손료, 야간	hr	8,531원
17	조명시설설치 및 철거	손료, 야간	일	237,405원
18	살수 및 청소	야간	m	1,592원
19	교통정리원	야간	인	169,496원

- 물량 증감 : 콘트리트깨기(소형브레이커)외 242개 공종

□ 주요 공종 세부 변경 내역 : 따로붙임(설계변경 내역서)

□ 설계변경 금액 내역                                                    (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
총 공사비		1,085,476,530	1,085,476,530	변동없음
도급비	1차수(2019년)	354,876,500	354,876,500	-
	2차수(2019년)	301,100,030	301,100,030	-
	총차	655,976,530	655,976,530	-
관급자재비		185,900,000	185,900,000	-
도로복구비 및 기타		243,600,000	243,600,000	-

첨부 : 설계변경 내역서 1부.  끝.