문서번호	어르신복지과-7852
결재일자	2020.4.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	장사문화팀장	어르신복지과장	복지기획관		복지정책실장
천관	이용민	김영란	정진우		04/21 강병호
협 조	녹지관리팀장			이해동
	예산1팀장			강진용

망우리공원 웰컴센터(가칭) 건립사업 변경계획

2020. 4.

복지정책실

(어르신복지과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□	국토법 등
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	국토부 방문협의
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

망우리공원 웰컴센터(가칭) 건립사업 변경계획

망우리공원 관리사무소(가칭‘웰컴센터’) 건립을 위한******************************************************************** 당초 사업계획을 변경하여 추진하고자 함

**************************************************

Ⅰ		사 업 개 요

□ 추진근거

○ 망우리묘지공원 역사문화관 건립 사업계획 : 2017. 3. 27.

○ 망우리묘지공원 역사문화관 건립사업 변경 : 2017. 6. 19.

○ 망우리묘지공원 웰컴센터 건립사업 변경   : 2018. 4. 12.

□ 사업개요(당초)

○ 위    치 : 서울시 중랑구 망우동 산57-1 (망우리공원 관리사무소 부지)

○ 사업기간 : 2017. 3. ∼ 2020. 10월

○ 사업규모 : 지상2층(연면적 1,250㎡), 주차장 30면

○ 사 업 비 : 5,528백만원

□ 그간 추진경과

○ 망우리공원 역사문화공원 기본계획 용역 및 시행계획 수립 : ’16. ∼ ’17년

○ 서울시 공공투자심사 완료 : ’18. 9월

○ 국내지명 현상설계 완료 : ’19. 1월

○ 설계공모(안) 사전설명 및 설계 착수보고 : ’19.3월

- 1층 : 야외 로비, 카페‧매점, 주차장  2층 : 대회의실, 관리실, 전망대

○ 망우리공원 웰컴센터(가칭) 기본 및 실시설계 완료 : ’19.12월

○ 건축행위 허가를 위한 관할 구청(중랑구) 사전협의 : ’19.12∼’20. 2월

○ 망우리공원 조성계획(변경) 고시 완료 : ’20. 2월

Ⅱ		변 경 계 획

□ 주요 변경 개요

구 분	당 초	변 경	증 감
위 치	중랑구 망우동 산57-1 (망우리공원 관리사무소 부지)	좌 동	-
사업기간	2017. 3.∼2020. 10.	2017. 3.∼2021. 12.	증 14개월
사업규모	지상2층(연면적 1,250㎡), 주차30면	좌 동
사 업 비	5,528백만 원	9,746백만 원	증 4,218백만 원

□ 변경사유 : ***********************

○ *****************************************************************

- ****************************************

- ******************************************* **************************************

○***************************************

- ***************************************************************************************

*************************************

□ 사업비 증액에 따른 재정투자심사 재심사 필요

○ 투자심사 후 총사업비가 당초 심사금액 대비 30%이상 증액 사업

- 웰컴센터(가칭) 사업은 당초(55억 원) 대비 변경(97억 원) 76.3% 증액됨

Ⅲ		향후 추진계획

********************************

********************************

********************************************************************************************************************************************

****************************

******************************

*****************************************

**************************************************************************

***********************

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅳ		행정사항

: 예산담당관 협조사항

□ 사업 대행기관(서울시설공단)에 사업추진 승인

○ 국토부 사전행정 절차 이행을 위한 사업기간 지연에 따라 2020년 재정신속집행 대상 제외

○***********************************************************************************************

붙임 ************************************