서울월드컵경기장 하이브리드잔디 조성사업

과  업  내  용  서

2020. 03.

과  업  내  용  서

1. 사 업 명 : 서울월드컵경기장 하이브리드잔디 조성사업

2. 목    적 : 주, 보조경기장의 노후된 잔디그라운드 기반 시설을 개선하고

하이브리드잔디를 도입하여 최적의 잔디그라운드 운영

3. 위    치 : 서울특별시 마포구 월드컵로 240, 서울월드컵경기장

○ 개    요 : 주,보조경기장 식재층 재조성, 하이브리드잔디 식재 등

4. 소요예산 : 금1,343,422,000원(금일십삼억사천삼백사십이만이천원)

5. 계약기간 : 계약일로부터 2021.12.15.까지(총차)

○ 준공 및 정산 : 반입 물량에 따라 준공정산

6. 계약방법

○ 장기계속계약(지방계약법 제24조 및 동법시행령 제78조)

구 분	금 액	계약기간
1차분	금800,000,000원(이월예정)	계약일로부터 2021.12.05.
2차분	금543,422,000원	2021.10.15. ~ 2021.12.15.

7. 예산항목 : 월드컵경기장,대행사업비,수선유지비,수선유지비(기타수선유지)

8. 사업개요 : 물품 및 공사가 혼재된 사업

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제1장 제1절 10.물품·용역·공사가 혼재된 계약의 집행)

○ 지방계약법(제28조 종합계약 등 ③항)

- 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 경비를 절약하고 사업을 효율적으로 추진하기

위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 지방자치단체가 체결하려는 공사ㆍ물품ㆍ용역

등의 계약을 한꺼번에 발주함으로써 통합하여 계약을 체결할 수 있다.

□ 구매설치 내용

○ 주경기장 하이브리드잔디(복합잔디) 제작 설치 및 식재층 재조성

- 하이브리드 롤잔디 식재(2021년 11~12월)  *K리그 일정에 따라 유동적

- 기존 천연잔디 재활용 : 주경기장 → 보조경기장  *필요시 예비포지

- 식재층 배수 및 잔디 생육환경 개선을 위해 모래(30㎝) 전량 교체

- 식재층 재조성용 모래는 관급자재로 공급

○ 보조경기장 천연잔디 교체 및 식재층 재조성

- 주경기장 천연잔디 이식(2021년 11월경)

- 주경기장 천연잔디 굴취 시 생육이 가능한 잔디에 한해 보조경기장 이식

- 팝업식 관수설비 구축

- 식재층 배수 및 잔디 생육환경 개선을 위해 모래(30㎝) 전량 교체

- 식재층 재조성용 모래는 관급자재로 공급

□ 하이브리드잔디 물품 납품내용

○ 매트형 하이브리드 롤잔디 재배(2020~2021년) 및 납품(2021년)

○ 구성내용 : 하이브리드잔디(복합잔디) 인조매트(T65㎜) + 한지형잔디(켄터키블루그래스種)

○ 적용범위 : 하이브리드잔디(복합잔디)용 인조매트 설치, 모래포설, 브러쉬,

파종, 생육관리(시비, 시약, 관수, 예지, 레이킹 등), 굴취 및

현장설치까지 전 공정

○ 납품규격 : 하이브리드 롤잔디(100㎝×10,000㎝×T4㎝, 천연잔디 예고 23㎜)

- 인조잔디 밀도 : 5%(허용오차 ±10%이내)   *K리그 인조잔디 매트 품질기준 준용

- 인조잔디 파일길이 : 65㎜

- 백킹(backing)구조 : 원활한 배수를 위해 격자 형태의 오픈형 그물망 구조로

배수가 용이한 간격 및 구조

- 마모 강도, 인발력, 투수성능은 한국산업규격(K.S) ‘표-2 인조잔디 매트의 품질기준’

및 ‘표-3 인조잔디 시스템 품질기준’과 동일 이상의 시험성적서 사전 제출

- 하이브리드잔디(복합잔디) 재배 시 사용하는 모래는 USGA(미국골프협회)에서

퍼팅그린에 관한 시방서에 명시된 혼합 상토의 입경분포에 따라 0.25～1.0㎜이

60% 이상인 골재를 사용하며 불순물 및 점토성분이 없어야 함.

- 재배농장 반입 전 사전 검수 및 전문기관의 품질시험을 통해 품질을 확인 한 후 반입

- 잔디 종자 파종량(g/㎡)은 18g/㎡의 비율로 발주기관이 지정한 켄터키블루그래스종

2개 이상의 품종을 혼합파종하며, 파종 전 자재 검수 시 잔디종자의 생산시기, 원산지가

명시된 서류 제출

9. 입찰방법 : 일반경쟁입찰

10. 참가자격 : ‘가’~‘라’항 모두 충족 자

가. 우리 공단이 제시한 납품설명서에 따라 납품이 가능한 업체로서, 사업자등록증 상

잔디재배를 등록한 업체 (예) 잔디재배, 잔디, 기타작물재배(잔디) 등

나. 국가종합전자조달시스템 입찰참가등록자격등록규정에 의하여 G2B 분류번호 10자리

1016189901(잔디)를 제조 또는 공급물품으로 입찰참가 등록을 필한 업체

다. 조경식재공사업

라. 점토성분이 없는 입경 0.25~1mm 강사로 조성된 한지형잔디 재배지를 10,000㎡이상

보유한 자로서, 누적 면적이 10,000㎡ 이상인 등기필증 혹은 농지임대차계약서를 입찰

참가자격 등록마감일까지 보유한 자

※본 사업은 단독이행만 가능하며, 분담이행방식에 의한 공동수급 불허 한다.

※ 입찰에 참가하려는 자는 상기 ‘가’, ‘라’번에 해당하는 자료를 입찰 전일까지 제출하여

확인을 필한 후 투찰하여야 하며, 기한 내에 발주처 확인을 거치지 않고 투찰한 업체는

개찰 시 제외됩니다.

① 사업자등록증 (예) 잔디재배, 잔디, 기타작물재배(잔디) 등

② 누적면적이 10,000㎡ 이상인 등기필증 혹은 농지임대차계약서

- 등기필증의 경우 소유자, 농지임대차계약서의 경우 임차인 명의가 투찰업체(대표자)이어야 함

※ 계약체결 전 현지답사 및 증빙서류 확인하여 부적합 시 낙찰 취소

- 농지임대차계약서 등 잔디재배지에 대한 소유여부를 증명하지 못할 경우

11. 하자담보 책임기간

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙

가. 제70조(하자보수보증금률) 5. 물품의 제조: 100분의 3 적용

나. 준공검사일로부터 2년