문서번호

기술계획처-2955

차장

팀장

처장

본부장

사장

등록일자

2020.04.27.

04/27

결재일자

2020.04.27.

공개여부

대시민공개

협조

방침번호

사장-291

2020년 1분기 통합공정관리 추진실적

2020. 4.

	기술계획처 공정관리팀

‘20년 1분기 통합공정관리 추진실적

기술분야 주요 예산사업에 대한 통합공정관리를 통하여 사업의 효율적 관리로 예산낭비 및 위험요소 사전제거, 사업의 적기 시행, 공사현장 안전사고 예방 및 시공품질 확보에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 본부장-38(‘20.2.24.) “2020년 기술본부 통합 공정관리 계획”

○ 공정관리 대상사업 선정 범위

- 3억원 이상 단일공사 및 복합공사(주공사의 부대공사 포함)

※ 3억원 이상 공사성 물품제작구매 및 용역 등 포함

□ 본부장-11(2020.1.20.) “19년도 및 4분기 기술본부 통합공정관리 추진실적”

Ⅱ		공정관리 대상사업 선정

□ 1분기 대상사업 선정: 515건             [단위 : 건, 백만원(추정치)]

구분	계		신규사업		계속사업
	공사건수	사업비	공사건수	사업비	공사건수	사업비
계	515	872,710	330	577,025	185	295,685
복합공사	397	622,931	247	452,032	150	170,899
단일공사	118	249,779	83	124,993	35	124,786

※ 매월 대상사업 변동여부 확인 및 선정

□ 1분기 분야별 대상사업                                        [단위 : 건]

구 분	계	전기	통신	궤도	신호	기계	전자	토목	편의	건축	안전문	승강기
계	515	137	59	27	45	92	12	41	35	46	6	15
신규	330	89	38	15	26	64	9	19	25	34	3	8
계속	185	48	21	12	19	28	3	22	10	12	3	7

Ⅲ		통합공정관리 추진실적

□ 1분기 공정관리 대상사업 총 515건 중 완료사업 38건, 시공중사업 205건(부진사업 4건 포함), 발주중 사업 85건, 설계중 사업 135건, 미도래 사업 52건 임.

○ 총  괄                                                         [단위 : 건]

구 분	계	완료	시공(부진)	발주	설계	미도래
계	515	38	205(4)	85	135	52

○ 완료 사업: 38건                                        [단위 : 건]

구 분	주요 사업명
계	총 38건
1 월	‧ 21건: 미아사거리역 등 2개역 변전소 소방설비 개량공사 등
2 월	‧ 9건: 5호선 개화산역 변전소 개량 건축공사 등
3 월	‧ 8건: 3,4호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(13차) 등

※ 완료사업 세부내역은 붙임1 참조

○ 시공중인 사업: 205건(부진사업 4건 포함)                  [단위 : 건]

합계	전기	통신	궤도	신호	기계	전자	토목	편의	건축	안전문	승강기
205	61	21	11	18	30	5	16	16	16	3	8

- 분야별 부진사업: 4건(전월대비 1건 증가)                  [’20.3.31. 현재]

구분	합계	전기	통신	궤도	신호	기계	전자	토목	편의	건축	안전문	승강기
당월	4	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-
전월	3	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
증감	△1	-	-	-	-	-	-	-	△1	-	-	-

- 사업 부진사유 [부진기준 : 실적/계획 대비율 90% 이하]

① [궤도1사업소] 2019년 3,4호선 노후레일 교환공사 (89.25%)

⇒ 현장여건상 가중치 낮은 공종 우선시행(발생레일 운반 등)

② [토목2사업소] 광명사거리역 승강편의시설 설치공사(34공구) (62.40%)

⇒ 통신지장물(LG, SKT 등) 저촉에 따른 개착부 시공계획 변경

③ [토목2사업소] 수락산 외 1역 승강편의시설 설치공사(36공구) (70.69%)

⇒ 현장여건 변경으로 인한 공사기간 연장 검토 중

(사유: 태릉입구역 하수관 저촉관련 흙막이공법 변경 등 설계변경 예정 등)

④ [토목2사업소] 군자 외 2역 승강편의시설 설치공사(37공구) (63.00%)

⇒ 통신지장물(KT, LG, SKT) 이설 지연에 따른 공사기간 연장 검토 중

※ 부진사업별 만회대책은 붙임2 참조

□ ’20년 예산사업 관리범위 확대실시에(예산 확정 시 예산사업계획(ERP등록)부터 준공까지 공정관리(‘19.11월 보고)) 따른 공사코드 생성현황

구분	전체	전기	통신	궤도	신호	기계	전자	토목	편의	건축	안전문	승강기
대상	515	137	59	27	45	92	12	41	35	46	6	15
코드생성	408	121	36	27	41	66	6	41	22	28	5	15
진행률	79%	88%	61%	100%	91%	72%	50%	100%	63%	61%	83%	100%

[‘20.3.31.기준]

※ ‘19년 대비 ’20년 1분기 공사코드 생성현황 : “전년대비 23% 증가”

□ 공사장 안전사고 예방활동

가. VOF(공사정보) 통합시스템 운영 및 고도화

○ 운영개요

- 사용개시일: ’18.1.2. (구축기간: 2017.6월~12월)

- 개발시스템: 통합 모니터링 시스템(PC/모바일기반), 공사정보 모바일 앱

- 특정위험작업(고소, 용접, 미세먼지 등) 시행 공사장 모니터링 안전관리

- ’18.2.1부터 ERP로 통합운용으로 공사정보 입력시스템 일원화

※ 5~8호선 ERP 미등록 공사장은 종합안전정보시스템에 등록

- VOF(공사정보) 등록실적                                       [단위 : %]

구분	계	전기	통신	궤도	신호	기계	전자	토목	건축	안전문	승강기
계	99.8	100	100	100	100	100	100	100	97	100	100
1월	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2월	100	100	100	100	100	100	100	100	100	공사없음	100
3월	99.3	100	100	100	100	100	100	100	94	100	100

나. 주요 공사장 CCTV 설치(LTE 클라우드 캠) 공사현장 고소작업 등 위해‧위험 작업의 안전관리 강화

○ 운영수량 : 28대(2019년 기운영+신설)

- 수락산 외 1역 승강편의시설 설치공사 등 11개 공사현장

○ 공사장 CCTV 모니터링 안전관리: 총 6건 개선조치

- 월별 조치건수

구분	계	1월	2월	3월
계	6건	5건	1건	-건

다. 공사현장 무재해 현황(’17.5.31.~’20.4.20.현재)      [붙임3 참조]

라. 진행중인 계약공사 대상『공사장 안전관리 상황 공유밴드』운영

○ 운영기간 : ’17.7.11부터 ~ 계속

○ 부서별 일일 공사현장 이상유무 확인 밴드 상황 등록

- 주간시행 공사(당일 18시까지 등록)

- 야간시행 공사(익일 09시까지 등록)

안전교육 시행	본선환기설비개량공사	궤도시설보수보강공사	신호설비개량공사	승강기ES트러스반입

마. 공사장 전담 자체 안전점검 시행

○ 점 검 자 : 기술계획처 공정관리팀(3조/2인1조)

○ 점검주기 : 주간 주1회이상, 야간 월1회 점검

○ 점검대상 : 서울교통공사 발주공사 중 유해․위험 공사현장

점검구분	공사현장 안전점검결과(건)			공사현장 (개소)	비고
	소계	현지시정	부서이첩
누 계	6	4	2	28
1월	1	1	0	15
2월	4	2	2	6
3월	1	1	0	7

주동선 자재적치

동선방해(부서이첩)

안전보호구(마스크) 미착용(현지시정)

바. 기술본부 합동 안전점검(기술사업소, 기술센터 합동점검)

○ 대상 : 사업소·기술센터 주1회 이상

○ 사업기간 : ’20.1.1. ~ 3.31

○ 점검대상 : 1~8호선 기술센터 관리 구간 시설물 및 공사현장

○ 합동점검 : 사업소(소장,PL,부장), 센터(센터장,관리소장)등

구분	점검장소 (센터개소)	점검인원(명)			우수 및 개선사례(건)	조치 (현장시정)
		관리단	사업소+센터	센터+센터
계	337	240	466	333	19	116
1월	105	78	146	105	3	16
2월	108	78	154	114	7	64
3월	124	84	166	114	9	36

보행자 통로

안전 보호 조치

(안전사고예방)

접지 매설장소

표지판 설치

(신속유지보수)

□ 통합공정관리 활동 강화

가. 공사 설계적정성 검토실적

○ 대상사업 : 3억이상 ~ 50억 미만 사업

○ 주요 검토내용

- 설계단계에서 설계서를 검토하여 설계오류, 과다설계, 품질개선 사항 도출 반영

- 사업목적과의 부합여부와 설계기준 등을 검토하여 대상공사의 규모 및 예산의 적정성 검토 등

○ 설계적정성 검토: 총 57개 사업                             [단위 : 건]

구분	계	전기	통신	궤도	신호	기계	전자	토목	건축	PSD	승강기
계	57	23	1	9	2	4	0	5	5	1	7
1월	15	11	-	-	-	3	-	-	-	-	1
2월	24	8	1	1	1	1	-	4	4	-	4
3월	18	4	-	8	1	-	-	1	1	1	2

- 검토결과 검토의견 제시: 총 310건

․ 설계내역 수정‧오류정정 및 원가계산 제경비율 조정 등 87건

․ 공사 시방서 내용 및 안전관리 사항 조정 등 219건

․ 공사비 조정 : 651,234천원 (비용절감 효과)

나. 공사장 미세먼지 저감대책 추진

○ 대상사업 : 기술분야 발주공사 중 역사내부 시행공사(터널제외)

○ 점검주기 : ‘17.8월부터 매월 1회 이상

○ 관리대상: 공사 중 비산먼지 발생공종 공사

○ 점 검 자: 사업소(단) 자체점검

○ 부서별 미세먼지 저감대책 추진실적                       [단위 : 건]

구분	계	전기	통신	궤도	신호	기계	전자	토목	건축	PSD	승강기
계	67	17	3	0	0	5	5	2	29	0	6
1월	16	3	1	-	-	1	1	1	7	-	2
2월	19	5	-	-	-	2	1	1	8	-	2
3월	32	9	2	-	-	2	3	-	14	-	2

□ 분야별 예산사업 추진현황

구분	계	전기	통신	궤도	신호	기계	전자	토목	편의	건축	안전문	승강기
계	1,015	252	91	65	62	207	33	71	73	123	12	26
공사	607	141	63	29	42	96	25	36	46	99	5	25
물품	184	67	18	18	14	40	1	8	0	12	6	0
용역	205	42	10	18	6	54	7	27	27	12	1	1
수선유지비	19	2	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0

가. 분야별 추진현황                                                 [단위 : 건]

나. 진행상태별 추진현황                                            [단위 : 건]

구분	계	전기	통신	궤도	신호	기계	전자	토목	편의	건축	안전문	승강기
사업 금액 (억원)	16,276	1,793	1,682	517	1,059	1,372	154	2,192	1,156	6,098	27	226
대상 사업	1,015	252	91	65	62	207	33	71	73	123	12	26
완료	57	11	5	2	1	14	0	14	1	8	0	1
시공중	398	104	36	18	22	88	12	29	29	46	3	11
계약중	133	51	6	8	7	34	1	4	5	12	3	2
설계중	112	35	35	1	0	22	5	0	9	2	2	1
시기 미도래	315	51	9	36	32	49	15	24	29	55	4	11

Ⅳ		향후 추진계획

□ 설계·발주 단계의 사업은 적기 추진하도록 기술본부 모든 예산사업 모니터링 및 전 분야 공유: 매월1회

□ 부진사업(4건)은 해당소속 부진대책을 마련하고 리스크 관리: 매월1회

□ 공정관리 사업이 누락되지 않도록 대상사업 변동여부는 매월 확인 및 선정관리.

붙임 : 1. 공정관리 대상사업 추진현황(총괄) 1부.

2. 부진사업별 만회대책 1부.

3. 부서별 공사현장 무재해 달성일수 1부.  끝.