코로나19 바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
			서울교통공사
수신자		내부결재
(경유)
제목	기술본부 예산사업 공정관리 추진실적 보고( ’20년 4월)

1. 관련근거

가. 본부장-38호(’20.2.24.): 2020년 기술본부 통합 공정관리 계획

나. 사장-291호(’20.4.27.): 2020년 1분기 통합공정관리 추진실적

2. 위호와 관련 ’20년 4월 기술본부 예산사업 공정관리 추진실적을 다음과 같이 보고합니다.

가. 공정관리 대상사업

○ 대상사업 선정                                             [단위 : 건, 백만원(추정치)]

구 분	합 계		신규사업		계속사업
	공사건수	사업비	공사건수	사업비	공사건수	사업비
계	513	831,185	329	536,065	184	295,120
복합공사	402	586,896	252	415,925	150	170,971
단일공사	111	244,289	77	120,140	34	124,149

○ 분야별 대상사업                                                       [단위 : 건]

구 분	계	전기	통신	궤도	신호	기계	전자	토목	편의	건축	안전문	승강기
합계	513	137	59	26	44	94	12	41	34	44	6	16
신규	329	88	38	14	25	68	9	19	24	32	3	9
계속	184	49	21	12	19	26	3	22	10	12	3	7

나. 공정관리 대상사업 추진실적

구 분	계	완료	시공 (부진)	발주	설계	미도래
계	513	43	269 (3)	61	96	44

다. 시공 중인 사업 중 공정부진사업 : 3건

구분	계	전기	통신	궤도	신호	기계	전자	토목	편의	건축	안전문	승강기
당월	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
전월	4	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-
증감	△1	-	-	△1	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 부진사업별 세부 만회대책 붙임3 참조

붙임 : 1. 2020년 4월 공정관리 추진실적 보고(4/30기준) 1부.

2. 공정관리 대상사업 추진현황(4월) 1부.

3. 부진사업별 만회대책(4월) 1부.  끝.

차장		팀장		처장		본부장	05/19
협조자
시행	기술계획처-3485	(	2020.05.19.	)	접수		(		)
우		서울특별시 성동구 천호대로 78길 15-48(용답동)	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	02-6311-9717	/전송		/	peperoyi@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
청렴으로 신뢰받고, 안전으로 보답하는 서울교통공사