함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사현장 실정보고에 대한 회신(강북구관내 상수도시설물 및 소화전공사)

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 공사감독2처-10997호(2014.07.11)호와 관련『2014년 강북구관내 상수도시설물 및 소화전공사』의 현장실정보고에 대한 검토를 완료하고 회신하오니 공사관리·감독 업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 강북구관내 시설물 및 소화전공사

나. 공사기간 : 2014.05.28 ~ 2015.05.31

다. 시 공 사 : 뿌리엔지니어링(주)  대표 고재근

라. 감 독 청 : 서울시시설관리공단

바. 회신내용]

연번	시설관리공단 실정보고		회신내용
	공사실정	조치의견
1	- 강북경찰서 교통협의 결과 야간공사 시행으로 협의	- 교통협의 및 간선도로 굴착으로 작업조건 변경 시행 (주간공사 → 야간공사)	- 작업조건 변경 승인 (주간공사 → 야간공사)

끝.

	북부수도사업소장
주무관	이한수		주무관	김만재		시설관리과장	07/14 김영훈
협조자
시행	시설관리과-10369	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 377번지	/
전화	3146-3406	/전송	3146-3439	/		/	부분공개(6)