문서번호	도로보수과-4751
결재일자	2020.5.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
이현화		이화신	05/27 고영준
협조

2020년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

추가 재배정 예산 조치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 5.

북부도로사업소

(도로보수과)

추가 재배정 예산 조치 계획

2020년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사(연간단가)와 관련, 예산이 재배정되어 원활한 공사추진과 사업의 효율성을 높이기 위한추진계획을 수립하여 시행코자 함.

		관련근거

❍ 횡단보도 확충정비사업 예산 재배정 통보[교통운영과-6079 (2020.4.10.)]

❍ 도로교통 소통 개선사업 예산 재배정 통보[교통운영과-6510 (2020.4.20.)]

❍ 2020년 교통사고 잦은곳 개선사업 예산 재배정 통보[교통운영과-6820 (2020.4.24.)

❍ 2020년 교통시설안전진단 지점 개선사업 예산 재배정 통보[교통운영과-7243 (2020.5. 6.)]

		사업개요

❍ 사 업 명 : 2020년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사(연간단가)

❍ 위    치 : 관내(종로, 성북, 강북, 도봉, 노원구) 시도상 차도

❍ 사업개요 : 차선도색 L=131,447m, 차선제거 L=19,410m,

도로표지병 설치 및 제거 : 30개

❍ 공사방법 : 교통운영과 규제심의 완료후 차선도색 및 복구(특별시도)

❍ 예    산 : 744백만원

- 안전총괄실 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리, 노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

		예산 재배정 현황

❍ 규 모                                              (단위 : 천원)

구 분	사 업 명	배 정 액			비고
		계	기배정액	금회배정액
재배정	2020년 교통안전시설 (노면표시)유지보수공사	864,790	744,800	119,990

❍ 세부 내역

연번	공사명	재배정 금액(원)	관련근거
		119,990
1	횡단보도 확충정비사업	13,540,000	교통운영과-6079
2	도로교통 소통 개선사업	52,820,000	교통운영과-6510
3	2020년 교통사고 잦은곳 개선사업	21,760,000	교통운영과-6820
4	2020년 교통시설안전진단 지점 개선사업	31,870,000	교통운영과-7243

❍ 예산과목

- 횡단보도 확충정비사업

· (교통사업특별회계) 도시교통실 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리(교통관리계정), 보행불편해소를 위한 횡단보도 확충정비, 시설비 및 부대비, 시설비

- 도로교통 소통 개선사업 예산

· (교통사업특별회계) 도시교통실 교통운영과, 도시교통 체계 및 소통개선,교통소통 및 안전관리 강화,도로교통 소통개선, 시설비 및 부대비, 시설비

- 2020년 교통사고 잦은곳 개선사업 예산 :

· (교통사업특별회계) 도시교통실 교통운영과, 도시교통 체계 및 소통개선,교통소통 및 안전관리 강화,교통사고 잦은곳 개선, 시설비 및 부대비, 시설비

- 2020년 교통시설안전진단 지점 개선사업 예산

· (교통사업특별회계) 도시교통실 교통운영과, 도시교통 체계 및 소통개선,교통소통 및 안전관리 강화, 교통사망사고 줄이기, 시설비 및 부대비, 시설비

		조치계획

❍ 금회 교통운영과에서 재배정된 4개예산(119,990천원)에 대하여 별도 발주시 관련절차 이행 및 공사추진 기간이 절대부족하므로,

❍ 우리사업소에서 시행하고있는『2020년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사(연간단가)』에 포함하여 공사를 신속하게 시행토록 하고 추후 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 관련공문 각1부.  끝.