의원 요구 자료 제출

시 행	도로계획과-9025	(		)
접 수		(		)
결재일자	2014.7.15.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	서울특별시의회의장(의 사 담 당 관),서울특별시의회의장(교통수석전문위원),기획담당관,도시안전과장

주무관	간선도로계획팀장	도로계획과장	도시안전실장		결재
신대식	김기용	형태경	전결 07/15 조성일
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 13번, 강감창 의원, 교통위원회)

따로붙임 : 강감창 시의원 요구자료 1부.  끝.

강감창 시의원(교통위원회, 새누리당)

[요구번호 : 13]

〈 제2롯데건설에 따른 교통개선대책 시행계획 대책 중 올림픽대로 하부      미연결구간 도로개설 관련 〉

1. 동 사업의 당초 사업기간 및 변경 사항(변경 사유 포함)

2. 동 사업 진행이 지연되고 있는 사유

3. 동 사업 진행을 위해 서울시가 롯데측과 협의한 사항

- 일시, 참석자, 회의 주요 내용 등

□ 의원님께서 요구하신 자료를 아래와 같이 제출합니다.

1. 동 사업의 당초 사업기간 및 변경 사항

❍ 당초 사업기간 : 사업기간이 특정되어 있지 않음

- 교통영향분석·개선대책 심의내용 : 시설의 규모 및 구조 등 최적화 시행방안, 시행시기, 공사주체 등에 대하여는 교통영향분석·개선대책수립과는 별개로 도시교통본부 및 관련부서와 협의 추진

2. 동 사업 진행이 지연되고 있는 사유

❍ 우리시는 1단계 전구간(1.12km)에 대한 도로개설 또는 지하차도(520m 개설) 사업비 678억원 납부 요구(’14.4.4)

⇒ 롯데는 2010년 이후 최초 사업비용 480억원 납부 또는 지하차도(520m 구간) 개설을 주장하여 왔으나, 최근(‘14.5.26) 1단계 전구간(연장 1.12km, 808억원)을 도로개설 하겠다는 의견 제출

❍ 장미아파트 구간 전면지하화 민원해결을 위하여는 추가사업비(300억원) 확보가 필요하여 롯데와 협의 중에 있음.

3. 동 사업 시행을 위해 서울시가 롯데측과 협의한 사항

❍ 제2롯데월드 교통개선대책 조속 이행 요청

- 문서번호 : 도로계획과-4397호(2014.4.4.)

❍ 제2롯데월드 교통개선대책 조속 이행 요청에 대한 의견 회신

- 문서번호 : CP건C토 제2014-96호(2014.5.26.)

붙임 : 협의문서 2부. 끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도로계획과)	담당사무관	김 기 용
	☎2133-8077	담당자	신 대 식
	작 성 일 : 2014. 7

이곳에 본문을 입력하세요