투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	인엔지니어링(주) 대표 이재우님
(경유)
제목	작업지시(2차) 기간 연기 요청 승인 알림

1. 인엔20-06-10(2020.6.11.)호 관련입니다.

2. 우리사업소와 귀 사가 계약체결하여 시행중인 2020년 도로시설물(터널, 복개, 지하차도 등) 일상유지보수공사와 관련한 2차 작업완료 연기 요청 건에 대하여 아래와 같이 승인 통보하니 시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

〇 연기사유 : 지하차도 집수정 준설토 함수비 시험의뢰 등 시일 소요

〇 연기기한

- 당초 : 2020.5.8.~6.15.

- 변경 : 2020.5.8.~7.15.(증 1개월).  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	이영택		시설보수과장	06/12 오재섭
협조자
시행	시설보수과-4776	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913 북부도로사업소 시설보수과(1층) (번동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-944-5451	/전송	02-945-5073	/	lyt4032@seoul.go.kr	/	대시민공개