“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	공원녹지과-17171		주무관	조경팀장		공원녹지과장		도시환경국장
			이경섭	방일길		김현경		06/23 안재혁
등록일자	2020.6.22.
결재일자	2020.6.23.
공개구분	부분공개(5)
			협조자		기획재정국장		신동명
					재무과장		지영애
					계약팀장		한혜란

“영동대로 경기고 주변 가로환경 개선사업” 실정보고 및 설계변경 추진계획

2020.  6.

	강 남 구
(		공원녹지과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 • 안전행정부 예규 제77호(2017.1.23.)「지방자치단체 입찰 계약 집행기준」
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 현장여건에 따른 물량 증가
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 근거 : 강남구 건설공사 설계기준 및 표준품셈
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 시민 다수
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ○ ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 해당 관련부서 및 규정 제반사항 적정
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당 없음

“영동대로 경기고 주변 가로환경 개선사업” 실정보고 및 설계변경 추진계획

우리구에서 시행중인 「영동대로 경기고 주변 가로환경 개선사업」과 관련하여 현장여건에 따른 변경사항이 발생하여 설계변경을 시행하고자 함.

1		사업개요

❏ 사 업 명 : 영동대로 경기고등학교 주변 가로환경 개선사업

❏ 공사기간 : 2020. 5. 11 ~ 2020. 6. 24

❏ 공사개요 : 목재모듈설치, 휴게공간 조성, 수목식재 등

❏ 사 업 비 : *****************************)

❏ 도 급 자 : ************

2		실정보고 및 설계 변경 사항

❏ 실정보고 및 설계변경

구 분	현황 및 문제점	변 경 내 용	비고
식재	○ 양쪽 입구 식재 물량 추가 반영 ○ 현장 여건을 반영하여 식재물량 변경반영 ○ 수급이 어려운 수종들은 기존수종에서 물량증감 및 교체로 반영	- 서양측백 15주 → 20주 - 황금편백 15주 → 0주 - 배롱나무 10주 → 18주 - 겹벚나무 15주 → 0주 - 겹벚나무-1 0주 → 21주 - 능수백도화 10주 → 0주 - 능수벚나무 0주 → 15주 - 이팝나무 0주 → 2주 - 남천 500주 → 760주 - 둥근사철 35주 → 0주 - 사철나무 700주 → 1130주 - 황금사철나무 350주 → 0주 - 눈향(블루칲) 330주 → 410주 - 회양목 1600주 → 1695주 - 화살나무 90주 → 150주 - 낙상홍 8주 → 0주 - 분꽃나무 40주 → 0주 - 산수국 540주 → 1510주 - 산철쭉 130주 → 180주 - 백철쭉 25주 → 40주 - 영산홍 40주 → 60주 - 일본조팝 820주 → 1440주 - 노랑말채나무 60주 → 120주 - 흰말채나무 120주 → 300주 - 황매화 90주 → 270주 - 비비추 1000본 → 1090본 - 아이비 2240본 → 2270본 - 에버골드 1060 → 1110본 - 털수염풀 470본 → 570본 - 억새(모닝라이트) 50본 → 100본 - 능소화 18본 → 0본 - 능소화-1 0본 → 26본 - 클레마티스 40본 → 50본 - 잔디 83m2 → 260m2	증)59,412,786
시설물	○ 현장 여건 반영하여 경관석, 플랜터, 휴게공간, 조명등, 맹암거,집수정, 원형수로관 변경 등	- 조경석놓기(2목) 27개소 → 0개소 - 조경석놓기(4목) 21개소 → 0개소 - 조경석놓기(6목) 24개소 → 0개소 - 경관석놓기(2목) 0개소 → 4개소 - 경관석놓기(4목) 0개소 → 4개소 - 경관석놓기(6목) 0개소 → 4개소 - 경관석놓기(8목) 0개소 → 2개소 - 경관석놓기(10목) 0개소 → 2개소 - 플랜터 0m → 20m - 플랜터-1 0m→ 35m - 휴게공간1 1식 → 0식 - 휴게공간1-1 0식→ 1식 - 화강석조명등 12개소 → 0개소 - 조명등 개소 → 8개소 - 맹암거(간선) 21m → 0m - 맹암거(지선) 20m → 0m - 집수정 1개소 → 0개소 - 원형수로관 77m → 0m	증)15,348,660
관급자재	○ 현장여건 반영하여 원형수로관,레미콘, 왕원추리 변경 등	- 원형수로관 77m → 0m - 원형수로관-1 0m → 8m - 원형수로관-2 0m → 4m - 레미콘-2 33m3 → 0m3 - 왕원추리 800본 → 0본	감)8,890,000
제경비	○ 건강보험료, 연금보험료 등 정산 ○ 제경비 변경 등	- 건강보험료 2,225,390원 → 0원 - 연금보험료 3,002,776원 → 0원 - 노인장기요양보험료 228,102원 →0원 - 퇴직공제부금비 1,534,752원 →0원 - 산업안전 보건관리비 4,984,291원 → 0원 - 환경보전비 647,717원 → 0원 - 기타 제경비 변경 40,175,085 → 32,452,363	감) 7,722,722

3		도급비 변경내역

구 분		금 액(원)			비 고
		당 초	변 경	증감액
총공사비		***********	***********	************
도급비	공급가액	***********	***********	************
	부가가치세	**********	**********	***********
	총 계	***********	***********	************
관급자재비		**********	**********	***********

4		예산집행계획

❏ 확보방안 : 본 사업비 내에서 예산잔액(낙찰차액) 사용

사 업 명	예산액 ①	지출품의액 ②	원인행위액 ③	예 산 잔 액 (낙찰차액포함) ② - ③	사 용 액 (원)	비고
가로수 및 띠녹지 보식	242,000,000	242,000,000	242,000,000	0	0
가로녹지 소규모 정비	372,887,000	158,863,000	108,243,000	50,620,000	49,709,700

❏ 예산과목

- 공원녹지과, 도시개발, 녹지조성 및 정비, 가로수 및 띠녹지 보식, 시설비 및 부대비, 시설비

- 공원녹지과, 도시개발, 녹지조성 및 정비, 가로녹지 소규모 정비, 시설비 및 부대비, 시설비

5		보고자의견

❏ 상기와 같이 설계변경 처리하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

붙임  1. 실정보고 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3.. 검증확인서 1부.  끝.