		서울신용보증재단
수 신	내부결재
(경유)
제 목	소상공인 정책연구센터 인테리어 공사 입찰(안)

「소상공인 정책연구센터 이전 계획(안)(안전관리팀-164, 2020.2.13.)」에 의거, 인테리어 공사 업체 선정을 위한 입찰 진행을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

1. 공사 내용

가. 소재지

명 칭	소 재 지
소상공인 정책연구센터	서울시 마포구 마포대로 163 서울신용보증재단 빌딩 6층

나. 인테리어 공사내역

공사 구분	공사 상세 내역
가 설 공 사	조립말비계 설치, 먹메김, 보양공사, 준공청소 등
수 장 공 사	인테리어필름 시공, 바닥카펫 깔기, DRY WALL 설치 등
금 속 공 사	경량 천장 철골틀 설치, 후레임 설치, 천정 점검구 설치 등
유 리 공 사	백페인트 그라스 설치, 투명 아크릴판 설치 등
창 호 공 사	도어힌지 설치, 강화도어 및 목재문 설치 등
도 장 공 사	친환경수성페인트 로울러칠 등
기 타 공 사	연구간행물 전시대 설치, 휴게공간 탕비장, 회의실 쇼파 등

주) 세부 상세내역 및 물량은 【붙임4】 공사 내역서 참고

2. 업체선정 방법(조달청 전자시스템)

가. 입찰제한 : 조달청 나라장터에 등록한 실내건축공사업(0006) 업체 중                          서울특별시 내 주된 영업소재지가 있는 업체

나. 선정방법 : 예정가격의 87.745%(낙찰하한율) 이상 최저가격 입찰자 순으로                    적격심사 후 최종 낙찰자 결정

다. 입찰공고 : 「코로나19 대응 관련 계약업무 운영 요령 안내」(재무과-7601,

2020.02.14.)에 의거 긴급공고(5일)로 입찰 진행

3. 기초가격 산정 및 예산과목

가. 기초 금액 : **** 원 (추정가격 *** 원)

나. 결정 방법 : 내역서에 따른 물량산정 및 자재․공정별 단가산출

다. 예산 과목 : 자본예산 - 업무용비품

4. 추후 일정

입찰공고	입찰마감	개찰 및 적격심사	최종 낙찰자 선정
2020. 3. 11.(수)	2020. 3. 17.(화)	2020. 3. 17.(화)	2020. 3. 19.(목)
(예상소요기간)	+6일	+6일	+8일
계약체결	착공일	준공일	개소일
2020. 3. 20.(금)	2020. 3. 23.(월)	2020. 4. 17.(금)	2020. 4. 20.(월)
+9일	+13일	+38일	+41일

주) 재단 내외부 사정에 따라 일정 일부 조정 가능

5. 기타 사항

가. 공정별 공사에 따른 세부사항 및 일정은 본점 시설관리부문과 협의 후 진행

나. 기타 공사, 구매, 용역 등은 진행 단계에 따라 추후 별도 품의 예정

붙 임 : 1. 입찰 공고문 1부

2. 긴급 입찰사유서 1부

3. 공사 도면 1부

4. 공사 내역서 1부

5. 공사 시방서 1부

6. 부당계약 체크리스트 1부  끝.

★과장			팀장			부장			이사			이사장
협조자	재무팀장
감사실장			안전관리팀			감사번호	163
시행	안전관리팀-312	(	2020.03.09.	)	접수		(		)
우	04130	서울 마포구 마포대로 163, 6층	/	http://www.seoulshinbo.co.kr
전화	02-2174-5549	/전송	02-3278-8125	/	iventree@seoulshinbo.co.kr	/	공개