“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(낙산배수지 건설공사, 총차분 3회, 4차분 1회)

1. 우리 본부에서 시행중인 낙산배수지 건설공사에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공사개요

1) 공 사 명 : 낙산배수지 건설공사

2) 공사개요 : 배수지 확충 2,300㎥
송수관부설 400㎜, 연장 597m

3) 공사기간 : 총차분 ’17. 12. 13.~’20. 6. 29.(4차분 ’20. 1. 1.~’20. 6. 29.)

4) 계약금액 : 총차분 2,368,135,000원(4차분 284,438,000원)

5) 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비
[세부사업명 : 낙산배수지 건설공사(21107000)]

6) 계 약 자 : ㈜엔씨종합건설 대표 최은학 외 1개사

나. 설계변경 현황 및 사유

1) 계약금액

(가) 총차분

금액                                                          (단위: 원)

***		***	***	*********
****		*************	*************	****************
	***	*************	*************	**************
	*****	***********	***********	***************

**********************************************************

(나) 4차분

금액

(단위: 원)

***		***	***	*********
****		***********	***********	***************
	***	***********	***********	***************
	*****	***********	***********	***************

2) 계약기간 : 변경없음

3) 변경사유 : 신공종 발생 및 물량 증·감 등

4) 도급비 집행 현황                                                       (단위: 원)

***	***	***	***	***	***
***	*************	*********	***********	*************	***********

붙임 : 1. 건설사업관리자 설계변경 검토 제출 공문 1부.
2. 설계변경 내역서 각 1부.
3. 설계변경 합의서 1부.
4. 제비율 검증확인서 각 1부.

5. 설계변경 설명서(실정보고 내역) 1부.

6. 물가변동 계약금액조정(ESC) 정산보고서 1부. 끝.

주무관	김형식		시설과장	송병욱		시설관리부장	신용철		상수도사업본부부본부장	06/29 구아미
협조자	주무관	이효원		시설팀장	최이영		주무관	손인숙
기전설비과장	조성태		재무회계과장	김분숙
시행	시설과-3314	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1491	/전송	02-3146-1429	/	see1997@seoul.go.kr	/	부분공개(5)