등록번호

아동청소년과-11082

주무관

아동돌봄팀장

아동청소년과장

복지문화국장

등록일자

2020.7.2.

안윤정

이용식

송미영

07/03

송광덕

결재일자

2020.7.3.

공개구분

부분공개(5 7)

협  조

	우리동네키움센터(서대문구2호점) 기본 및 실시설계 용역
	준공기한 연기 검토 보고

서 대 문 구

아동청소년과

	우리동네키움센터(서대문구2호점) 기본 및 실시설계 용역
	준공기한 연기 검토 보고

우리동네키움센터(서대문구2호점) 기본 및 실시설계 용역 추진 과정 중 「키움센터 세움 가이드라인 2020」 및 「공간조성사업 성별영향평가 가이드라인」 반영 등으로 당초 기한내 준공이 불가함에 따라 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 함

1		관련근거

❍ **************************************

〔*******************************************〕

2		용역개요

❍ 용 역 명 : 우리동네키움센터(서대문구2호점) 기본 및 실시설계 용역

❍ 위    치 : ******************************

❍ 용역기간 : ************************

❍ 계 약 자 : ******************

❍ 계약금액 : *******************

3		추진경과

❍ 2020. 5. 29. : 우리동네키움센터(2개소) 설계용역 추진계획 수립

❍ 2020. 6.   5. : 계약 체결

❍ 2020. 6.   8. : 용역 착수 및 기본설계 보고회 개최

❍ 2020. 6. 29. : 중간 설계 보고회 개최

4		준공기한 연기 세부사항

❍ 우리동네키움센터(서대문구2호점) 설계용역 세부 추진 경과

***************************

❍ 용역기간 변경 사유

- 공공시설·공간조성사업에 대한 성별영향평가 가이드라인 반영

- 우리동네키움센터 세움 가이드라인 2020 적용

- 안산초등학교 돌봄교실 현황 공유

- **************************

- ***************************************

❍ 용역기간 변경사항

당초	변경	검토 의견	비고
******************* *****	******************** *****	**********	****** *******

❍ ********************************

❍ *****************

❍ 검토 의견

- 용역기간 변경(연장) 사유가 「서울시 우리동네키움센터 세움 가이드라인 2020」및「공공시설·공간조성사업에 대한 성별영향평가 가이드라인」추가 적용으로 당초 준공기한내 준공 불가하므로, ************하여 준공에 만전을 기하고자 함

5		향후 일정

❍ **********************

❍ 2020. 8. ~ 9. : 리모델링 공사 추진

❍ 2020. 9. : 우리동네키움센터(서대문구2호점) 개소

6		행정사항

❍ 재무과 : 준공기한 연기 요청

붙임  1. 우리동네키움센터 설계(안) 1부.

2. 관련 공문 1부.  끝.