공 사 설 계 검 토 서

건 명		2020년 강동구 관내 상수도시설물 정비공사		요청기관(부서)	강동수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2020. 4. 23.		공 사 금 액	금469,700천원
계약방법		-		검 토 금 액	금456,654천원 ( 감13,046천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 노후밸브 교체 : 117개소 ○ 밸브실 정비 : 132개소
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가 조정 - 중기기초 자재(휘발유, 경유) : 4월 단가 적용 - 터파기(0.2) : 지세할증 제외 ○ 물량 조정 - 토공(터파기, 되메우기, 다짐, 잔토, 환토재) 수량 일치 - 파쇄물(깨기, 운반, 상차) 수량 일치 - 원형밸브실 설치공, 철개고정장치 설치공, 나사조임 수량 일치 - 사급자재 추가 : 철개고정장치 등 ○ 규격 명시 - 인력터파기 : 0-1m			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 간접노무비(직노×율) : 당초 12.7% → 조정 13.0% ○ 기타경비((재+노)×율) : 당초 8.8% → 조정 9.1% ⇨ 총 공사기간 7~12개월 적용 ○ 산업안전보건관리비 제외
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.