“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	새로운 광화문광장 조성 기본 및 실시설계용역 변경 계약(시민광장)

1. 광화문광장추진단-11787호(2019.10.17.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 『새로운 광화문광장 조성 기본 및 실시설계 용역』에 대해 아래와 같이 변경계약 추진코자 합니다.

가. 용 역 명 : 새로운 광화문광장 조성 기본 및 실시설계 용역

나. 계 약 자 : *******************

다. 용역기간 : 2019.03.22. ~ 2020.06.22.(총차)

- 1차 : 2019.03.22.~ 2019.11.25

라. 계약금액 : **********************************

마. 변경사유 : 광화문 일대 미래비전 수립 및 지하공간 설계 등 추가과업 수행

바. 변경금액 : *******************************************************

***************************************************

사. 예산과목 : 도시재생실 광화문광장추진단, 광화문일대 역사성 장소성 회복, 시민중심대표공간 조성, 광화문 시민광장 조성, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

*****************  끝.

주무관							황서현			광장계획팀장					이강수					광화문광장사업반장					10/23 임창수
협조자
시행			광화문광장추진단-11940									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지서울빌딩9층															/
전화		02-2133-2030						/전송			02-2133-1080					/	spinosus@seoul.go.kr												/	부분공개(5)