등록번호

사회복지과-24156

★주무관

장애인정책팀장

사회복지과장

복지문화국장

등록일자

2020.8.3.

이자영

김형철

이나령

08/04

송광덕

결재일자

2020.8.4.

공개구분

대시민공개

협  조

올해피 장애인복지센터(장애인복합문화센터)

보수 및 비상구 설치 공사 시행 계획

서 대 문 구

사회복지과

올해피 장애인복지센터(장애인복합문화센터)

보수 및 비상구 설치 공사 시행 계획

장애인복지사업을 위해 사용 및 관리하고 있는 올해피 장애인복지센터 건물에 대해 미흡점을 보완함으로써 장애인들이 더욱 안전하게 시설을 이용할 수 있도록 하고자 함.

Ⅰ		사업개요

▢ 추진근거

◦ 사회복지과-30018(2019. 10. 7.) 2020년 장애인복지 관련 시설 수선 및 유지관리 계획

◦「건축법」제53조(지하층)

▢ 추진사유

◦ 2018. 7. 17. 기존 노후 건물을 실내건축을 통하여 장애인복합센터로 사용하고 있으나, 노후 건물의 한계로 인하여 잦은 문제 발생

- 오·하수 배관 노후화에 따른 배관시설 교체 필요

- 옥상 누수 발생으로 방수 공사 필요

◦「건축법」제53조(지하층)에 따른 비상탈출구 설치 필요

- 거실 바닥 면적이 50제곱미터 이상인 층에는 직통계단외에 피난층 또는 지상으로 통하는 비상탈출구 설치 하여야 함.

▢ 공사개요

◦ 공 사 명 : 올해피 장애인복지센터(장애인복합문화센터) 보수 및 비상구 설치 공사

◦ 위    치 : 서대문구 세검정로 78-19(홍제동 279-30)

◦ 소 유 자 : 서울시(토지, 건물)

◦ 건물규모 : 대지면적 273㎡, 연면적 598.45㎡, 지하1층/지상3층

◦ 공사기간 : 2020. 8월 중순 ~ 9월 중순

◦ 총사업비 : 22,000천원

Ⅱ		공사발주 계획

▢ 총공사비 : 22,000천원

▢ 공사내역

◦ 공사위치

- 배관공사 : 건물 뒤 주차장 오·하수 배관

- 방수공사 : 건물 옥상

- 비상구 공사 : 지하 강당 건물 앞 환풍구와 연결 된 창

◦ 현 황

- 배관 노후화에 따라 배관 막힘이 자주 발생하여 화장실 사용이 불편

- 우천 시 옥상에 비가 새어 건물 관리에 어려움

- 비상구 부재로 재난 발생 시 지하 강당 대피에 어려움

◦ 공사내용

- 건물 뒤 주차장에 위치한 노후화된 오·하수 배관 교체

- 옥상 우레탄 방수 실시

- 지하 강당 비상구 설치

노후 오·하수 배관 교체 공사	옥상 방수 공사
사다리 설치 후 상담실 천장을 통해 외부 탈출
비상구 설치 위치(지하 강당 상담실)	외부 비상구 탈출 위치

▢ 계약방법 : 수의계약

▢ 사업기간 : 2020. 8월 초 ~

◦ 발주시기 : 2020. 8. 7. 한

◦ 착수시기 : 2020. 8. 13. 한

◦ 공사기간 : 2020. 9. 12. 한(착수일로부터 30일)

Ⅲ		예산집행 계획

▢ 소요예산 : 22,000천원

▢ 예산과목 : 장애인 재활자립기반 확충, 장애인 복지시설 운영, 장애인 복지시설 지원, 시설비및부대비, 시설비.  끝.