문서번호	녹지관리과-3628
결재일자	2020.8.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹지관리과장	공원부장
임혜리		곽영만	08/07 김인숙
협 조
	생태환경과장			이정환
	공원여가과장			강계표
	공원시설과장			최연호

한강공원 공원분야 홍수피해 복구계획

공   원   부

(녹지관리과)

한강공원 공원분야 홍수 피해 복구 계획

2020. 8월 중부지방 집중 호우로 인한 한강공원 녹지 및 체육시설등의 침수에 대한 복구대책을 조속히 수립·시행하여 이용객의 불편을 최소화하고 쾌적한 공원환경으로 유지하고자 함.

Ⅰ		기상상황 및 피해현황

□ 기상상황

○ 기상상황 및 누적강수량                      (2020. 8. 7.(금).08시)

구 분	기상특보	누적 강수량 (8.1.~8.6.)	비고
서 울	호우경보 발령중	271.2mm
경기북부(동두천)		434.6mm
강원북부(북춘천)		564.9mm
충 주(엄정)		466.0mm

○ 방류량 및 잠수교 수위

수계 방류량	팔당댐	북한강 수계			남한강 수계	잠수교 수 위
		청평댐	소양강댐	춘천댐	충주댐
최대 방류량 (㎥/s)	16,641 (8.6.07:50)	9,797 (8.6.08:00)	2,150 (8.5.23:50)	5,002 (8.5.18:10)	2,999 (8.5.17:30)	9.90m (8.6.08:00)

※ 도달시간 : 충주댐~팔당댐약15시간(방류량 3,000톤)(청평~팔당 2.5Hr, 10,000톤)

팔 당 댐 ~ 잠 수 교  약  4.2시간(방류량 15,000㎥/s)

□ 침수피해

○ 집중 호우로 한강 수위가 상승하여 한강공원 전면적인 침수

○ 생태공원 등 녹지시설

- 생태공원 : 장시간 침수로 수목이 도복되고 뻘 퇴적

- 자연학습장 : 장시간 침수로 작물 등 폐기처분 대상

- 녹 지 대 : 전면 침수로 쓰레기 등 부유물 산재

- 초 화 류 : 장시간 침수로 초화류 폐기처분 대상

○ 체육 및 편의시설

- 구기운동장 : 경기장면의 침수로 표면 토사가 세굴 내지 퇴적

- 운동시설물 : 장시간 침수로 시설물의 베어링 등 주요 부분 뻘이 채워져 있음

- 어린이놀이터 : 장시간 침수로 모래장 뻘이 채워져 있음

- 수  영  장 : 한강공원 수영장 및 물놀이장 전면 침수

- 난지캠핑장 : 캠핑장 정비공사로 폐장 중

- 주  차  장 : 43개소 중 10개 공원 36개소 전면 침수로 쓰레기 등 부유물 산재

Ⅱ		주요 시설 현황

□ 생태공원 및 녹지시설 현황

구분	생태공원		녹지대		수 목
	개소	면적(㎡)	종류	면적(㎡)	기 존	한강숲조성 (‘19~’20년)
내 용	6	2,319,122	5종	5,086,000	409만주	336,296주

□ 체육 및 편의시설 현황

구분	위탁시설		직영시설		체력단련장		어린이 놀이터	수영장	캠핑장	주차장	움수대
	종류	면적(㎡)	종류	개소수	장소	수량
총 계	5 종 (9개소)	57,346	13종	136	78개소	1,004	18	8개소	1개소	43개소	159

Ⅲ		복 구 계 획

□ 추진 근거 : 2020년 풍수해 분야 재난안전대책 행동안내서

□ 복구 기간 : 피해원인 종료된 후 20일 이내 완전복구

□ 복구 방법

○ 피해상황 보고

- 보고대상 : 당해 기간내 발생한 피해만 대상으로 함

- 보고시기 : 피해 최종보고는 기상특보, 홍수 등 피해원인이 종료된 후              5일 이내 재난안전대책본부(시청)에 보고(본부 4일 이내)

○ 복구원칙 : 응급과 항구로 구분 시행

- 응급복구(안내센터): 각 센터에 보관된 비축자재 사용(비닐, 모래 등)

- 항구복구(소관과): 단기간내 응급복구가 곤란한 하천 내 시설물

· 경미한 피해 : 시설물 유지보수업체에 작업 지시

· 중대한 피해 : 가용예산, 예비비, 재난관리기금 등 별도 방침 수립

○ 시설물별 복구 방법

- 광장 및 아스팔트 도로 : 물차+스키로더+인력 작업

- 자연흙포장 산책로, 녹지구간 : 물차+양수기를 이용한 인력 작업

- 자연형 호안 식재 구간 : 물차+양수기를 이용한 인력 작업

※ 중·고수 호안에 퇴적된 “뻘” 자연형 호안 식재구간으로 이동 금지

- 목재 데크 조성구간 : 물차+양수기를 이용한 인력 작업

○ 공원 특성별 뻘 제거 방법

- 생태공원 : 고덕수변, 암사생태, 난지생태, 여의샛강, 강서습지, 노들섬

· 생태습지공원은 장비투입이 곤란하여 인력작업 시행(센터 및 시설부 계약업체)

- 특화공원 : 반포, 여의도, 난지, 뚝섬

· 수변무대, 광장 구간 등은 중장비 통행시 포장시설물 손괴 우려가 있어 현장    상황에 익숙한 숙련자 작업(센터 및 시설부 계약업체)

- 일반공원 : 광나루, 잠실, 잠원, 이촌, 망원, 강서, 양화,

· 침수 횟수, 뻘처리 작엄면적을 감안하여 안내센터 자체 수행토록 하되 추가     지원 요구시 시설부에서 인력 및 장비 지원

○ 소관과별 업무분장

추진부서	업무내용
생태환경과	○ 한강숲 조성지 조치 → 피해사항 조사 보고 → 도복 수목 복구 및 제거 → 수목폐기물 적치
공원여가과	○ 생태공원 유지관리 → 피해사항 조사 보고 → 산책로, 가시권 정비(물청소-시설부, 청소-센터, 수목-녹지관리과) ○ 직영 및 위탁체육시설 안전점검 및 피해 복구 → 피해사항 조사 보고 → 자전거도로변 테니스장 등 비구방지용 펜스, 망 특별점검 및 조치 → 연간단가업체 및 위탁업자를 통한 피해복구 실시
녹지관리과	○ 체육, 편의시설 안전 점검 실시 → 피해사항 조사 보고 → 침수에 따른 어린이놀이터 시설 점검 및 정비(모래 교체 포함) → 침수에 따른 운동기구 베어링 등 상태(뻘 등) 점검 및 정비 → 유수에 의한 시설물 파손 여부 점검 ○ 녹지대 청소 및 고사목 정비 → 피해사항 조사 보고 → 도복수목 정비 및 목재폐기물 반출
공원시설과	○ 주차장 및 수영장 안전점검 및 피해 복구 → 피해사항 조사 보고 → 주차장 : 주차관제시스템 안전 점검 및 복구(운영자와 합동) → 수영장 : 수질관리시설 안전 점검(제조회사와 합동) 욕조 내 뻘 및 협잡물 청소(시설부, 센터 지원)

□ 둔치부 작업 방법(시설부 실시)

○ 작업시기 : 뻘이 굳기 전, 둔치의 물빠짐이 진행되는 동안 실시

○ 작업방향 : 경사도 활용하여 상류에서 하류로, 제방에서 수변으로 작업

○ 장비조합 : 스키로더, 솔차 → 물차 → 빗자루, 넉가래 등 순으로 청소

- 스키로더 및 물차 최대한 동원 예정

- 굳어진 뻘은 굴삭기, 덤프트럭 추가 투입

○ 인력 조합 : 상황에 따라 변경

- 물차 인력 2명+로더 2명+급수전 2명 = 6명 1개조

○ 수변가 등은 한강물 활용 양수기로 물청소 : 2명

○ 급수 방법 : 전반기 한강물 사용, 후반기 급수전 사용

○ 잔디밭, 차량출입 불가지역 : 양수기 활용 살수 작업하여 청소

Ⅳ		행 정 사 항

□ 피해사항 조사 보고 철저

○ 피해사항 조사가 누락되어 이용객 불편이 없도록 철저히 조사

○ 피해사항 조사는 복수복명 및 관련업체와 합동조사로 피해사항 조사

○ 피해사항 보고 기일 준수 : 피해원인 종료후 4일 이내(치수과 통보)

○ 피해복구에 따른 예산확보 : 가용예산 파악 및 재난관리기금 신청

□ 정밀 조사 및 시공(피해복구시 2차 인위적 피해 예방)

○ 설계용역을 통한 정밀설계로 공정이 누락되는 일이 없도록 조치할 것

□ 물청소용 물차 용역 확보

○ 용역부서 : 녹지관리과

○ 확보물량 : 16톤 차량 20대.  끝.