문서번호	도시철도사업부-7020
결재일자	2018.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신교통2과장	도시철도사업부장
서현준		성원배	07/25 박동룡
협 조
	주무관			박노성
	주무관			김동일

『별내선(8호선연장) 2공구 건설공사』
관급자재 납품기한 연기 검토 보고

2018. 7.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

『별내선(8호선연장) 2공구 건설공사』
관급자재 납품기한 연기 검토 보고

『별내선(8호선연장) 2공구 건설공사』에 소요되는 관급자재(레미콘) 납품기한 연기 요청건에 대한 검토 보고임.

□ 관련근거

○ 별내선2 건사관 제2018-378호 (´18.7.24, 관급자재(레미콘)납품기한 연기요청)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 별내선(8호선연장) 2공구 건설공사

○ 위    치 : 강동구 암사동 현대홈타운 앞 ~ 경기도 구리시 토평동 일원

○ 규    모 : L=2.536km, 환기구 2개소

○ 공사기간 : ´17.9.30. ~ ´23.9.28. (1차 : ´17.9.30. ~ ´18.7.26.)

○ 도 급 비 : 133,800백만원 (1차 : 10,000백만원)

○ 시 공 사 : 두산건설㈜

○ 건설사업관리단 : ㈜도화엔지니어링 외 2개사

□ 관급자재 계약현황

○ 계약현황

구 분	납품요구번호	규격	계약수량(㎥)	납품기한	비 고
레미콘	12-17-1-89052-00	25-16-80	24	´18.7.26.
		25-24-150	364
		25-27-150	2,339
		25-18-150	2,114
		25-21-150	211

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 1차 설계변경으로 인한 소요수량 변경

구분	규격	단위	계약수량	납품량	잔여량	납품기한		비고
						당초	변경
레미콘	25-16-80	㎥	24	24	0	´18.7.26.	´18.10.30.
	25-24-150		364	96	269
	25-27-150		2,339	2,081	258
	25-18-150		2,114	1,919	195
	25-21-150		211	177	34
	소 계		5,052	4,297	756

□ 조치계획

○ 별내선(8호선연장) 2공구 건설공사의 설계변경으로 인한 관급자재 소요수량이 변동되어 납품기한을 아래와 같이 변경하고자 함

구 분	연기사유	납품기한		비고
		당초	변경
레미콘	1차 설계변경으로 소요수량 변동	´18.7.26.	´18.10.30.

○ 계약부서(건설총괄부)에 납품기한 연장 의뢰

붙  임 : 관급자재(레미콘) 납품기한 연기요청문 1부.  끝.