투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(서울함공원 미디어월 설치공사-금속구조물, 전기)

1. 한강관광사업과-1964호(2020.8.25.)와 관련입니다.

2. 우리과에서 시행중인『서울함공원 미디어월 설치공사(금속구조물, 전기공사)』 2건의 준공기한을 아래와 같이 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

- 공 사 명

ㆍ서울함공원 미디어월 설치공사(금속구조물)

ㆍ서울함공원 미디어월 설치공사(전기)

- 공사기간

ㆍ금속구조물 : 2020. 6. 05. ~ 2020. 8. 30.

ㆍ전기공사 : 2020. 5. 20. ~ 2020. 8. 31.

- 계약금액

ㆍ금속구조물 : *********

ㆍ전기공사 :  ********

- 계 약 자

ㆍ금속구조물 : **************

ㆍ전기공사 : *************

나. 준공기한 연기

- 금속구조물 : 당초) 2020. 8. 30. → 변경) 2020. 9. 30.

- 전기공사 : 당초) 2020. 8. 31. → 변경) 2020. 9. 30.

다. 귀책소재 및 연기사유

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 : 오랜 장마로 인한 절대공기가 부족하여 사업시행 완료를 위하여 추가 기간 소요

붙임 1. 준공기한 연기보고 방침서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 각 1부. 끝.

	한강관광사업과장
주무관	정영상		한강관광사업과장	08/25 김호규
협조자
시행	한강관광사업과-1970	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 2층 한강관광사업과(성수동 1가)	/
전화	02-3780-0737	/전송	02-3708-0740	/	jysloves@seoul.go.kr	/	부분공개(5)